문서번호	시설관리과-35487
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김재영		최재영	12/16 최명익
협 조

설계변경 심의 위원회 개최결과 보고

[2016년 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역]

2016. 12

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 「2016년 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역」과 관련하여 시공물량 증·감으로 인해 계약금액 변경 사유가 발생함에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역

○ 도 급 자 : (주)수도권환경  대표 이병권

○ 용역규모 : (당초) 폐아스콘 1,530 ton, 폐콘크리트 350ton

(변경) 폐아스콘 1,251 ton, 폐콘크리트 207ton감(539ton)

○ 계약기간 : 2016.06.01 ～ 2016.12.31.

○ 용역금액 변경 내역 :

구 분	금 액 (원)		증․감 (원)	비 고
	당 초	변 경
총 용 역 비	65,645,000	64,460,000	감 1,185,000	물량증·감 계약금액 변 경
도 급 비	65,645,000	64,460,000	감 1,185,000
공 급 가 액	59,677,273	58,600,000	감 1,077,273
부 가 가 치 세	5,967,727	5,860,000	감 107,727

□ 설계변경 주요사유 및 세부목록

○ 용역시행에 따른 물량 증감

- 관련근거

ㆍ공사감독2처-8278(2016.7.20)호 “현장실정보고(폐아스콘 폐기물 반입불가)

ㆍ시설관리과-20521(2016.7.25)호 “현장실정보고에 대한 회신 : 승인”

ㆍ폐아스콘 처리(신규대가) : 2,168톤(증 2,168톤)

2. 심 의 개 최

○ 심의일시 : 2015년 12월 16일(금) 15:30

○ 심의장소 : 시설관리과

○ 심의위원 : 위원장 시설관리과장

위  원 급수운영과(시설6급 배성호, 시설6급 김찬오, 시설6급 주재연)

시설관리과(시설6급 최재영, 시설6급 박종일)

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 관련규정 및 적법성 여부

다. 설계변경 세부내용 및 사유

4. 심 의 결 과

○ 물량변동의 적정성 여부 : 적정

○ 관련규정 및 적법성 여부 : 적정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 : 적정

첨 부 : 1. 심의 의견서 1부

2. 설계변경 도서(시설관리공단 변경 서류) 각 1부.  끝.