문서번호	시설관리과-35622
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박태욱	윤덕묵	천성훈	12/16 代이두영

『2016년 자동제어설비유지관리용역』

설계변경 검토보고

2016. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『2016년 자동제어설비유지관리용역』

설계변경 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 「2016년 자동제어설비유지관리용역」과 관련 본부 합동점검시 지적사항 등에 대한 작업지시(1~3차)로 신규 공종 및 당초 물량 감에 따른 설계변경 요청이 있어 이를 검토하고 보고드림.

□ 관련근거

○ 제2017-021호(2016.12.15.) : 변경 계약 요청건

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 자동제어설비유지관리용역

○ 용역규모 : 노량진배수지 등 34개소 원격감시제어반 유지보수

○ 용역기간 : 2016.3.31. ~ 2017.3.31.(36개월)

○ 계약금액 : 금61,197천원(금차분 46,846천원)

○ 용역업체 : ㈜종성테크 대표 임성규

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 작업지시서(1~3차)에 의한 신규공종 발생 및 계약물량 “감”에 의한 계약변경

· 제1차 작업지시 : 시설관리과-11009호(2016.4.26.)

· 제2차 작업지시 : 시설관리과-19462호(2016.7.18.)

· 제3차 작업지시 : 시설관리과-28095호(2016.10.12.)

○ 세부 변경내용

(단위:천원)

구 분	신규 공정	증·감	비 고
계		5,873
1 차 작업지시	- PLC 데이터 백업용 밧데리(44개) 전원용 서지보호기 설치 등	2,617
2 차 작업지시	노량진(배) 통합제어센터 감시용 모니터 구매 설치(2대)	681
3 차 작업지시	봉천6-2(배) 펌프제어반 철거 등	2,575

○ 용역금액 변경현황

(단위:원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증·감	비 고
총 차	61,197,500	61,197,500	-
1 차	46,846,560	46,846,560	-
2 차	14,350,940	14,350,940	-

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 본부 점검시 지적사항 등에 대한 신규공정        및 계약물량 조정으로 계약금액 변동없이 설계변경을 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.