문서번호	생산관리과-17454
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		경영관리부장
신왕근	한희선	구자훈		12/16 정진일
협 조

『뚝도정수센터 농축조공사  폐기물처리용역』

“용역기한 연장 및 계약금액 변경 요청” 검토 보고

2016.  12.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조공사 폐기물처리용역』

“용역기한 연장 및 계약금액 변경 요청” 검토 보고

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리용역』관련하여 건설사업관리책임기술자로부터 “용역기한 연장 및 계약금액 변경 요청 보고”가 있어 이에대한 검토사항을 보고 드림

※ 설계변경에 따른 용역기간 및 계약금액 조정 요청〔폐기물, 전체 2회〕

(한국종합 2016-12-561호, 2016.12.15.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 12. 31.

❍ 계약금액 : 237,699,000원

❍ 계 약 자 : 목화산업㈜ 외 1개사

❍ 용역내용 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사로 발생되는 폐아스콘            및 폐콘크리트, 폐임목 등 건설폐기물 수집·운반·처리

Ⅱ		변경 사유

❍ 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)의 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장

❍ 폐기물 발생량 증가에 따른 처리수량 변경 반영

※ 뚝도정수센터 농축조공사(토목,기계) 설계변경(1회) 현황

구 분		공사기간		도 급 액(천원)
전체	당초	’15.11.27∼’16.11.26		3,448,907
	변경	’15.11.27∼’17.06.30	(증)7개월	3,673,791	(증)224,884

Ⅲ		CM 보고내용

❍ 용역기간 변경

【당 초】 2016. 04. 11. ~ 2016. 12. 31.

【변 경】 2016. 04. 11. ~ 2017. 06. 30.(증 181일)

❍ 수량 변경 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
폐콘크리트	TON	6,488	7,211	증 723
폐아스콘	TON	1,183	1,183	-
폐임목	TON	43	43	-

❍ 계약금액 변경

용역비 증.감 (천원)				비 고
항 목	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	216,090	236,190	증 20,100
부가가치세	21,609	23,619	증 2,010
도급금액	237,699	259,809	증 22,110

Ⅳ		검토 의견

❍ 상기 CM 보고내용과 같이 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)의 공사기간 연장 및 설계변경 수량 변경에 따른 폐기물처리 용역 기한 연장 및 물량을 반영한 설계변경 사항으로, 검토결과 적정하므로 설계변경 후 본부 재무회계과로 변경 계약 요청코자 합니다.

따로붙임 : 1. 건설사업관리단 공문 및 검토의견서 1부.

2. 건설사업관리용역 설계변경 내역서 1부. 끝.