문서번호	방재시설부-19972
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수시설과장	방재시설부장
박중모	代이병환	12/16 임춘근

-청계천 생태환경 개선공사(2단계)-

설계변경 검토보고(총차1회,1차1회)

2016. 12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

-청계천 생태환경 개선공사(2단계)-  설계변경 검토보고(총차1회,1차1회)

현장여건 변경 등 실정보고 승인 처리된 건에 대한 감독기관 제출 설계변경(총차1회, 1차1회)에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 설계변경 제출(서울시설공단 공사감독2처-17847호 : ‘16.12.14)

1		공사개요

□ 공 사 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계)

□ 공사내용 : 여울보 및 징검다리 개선(12개소), 저수호안 사행개선(283개소)

하상차수제 천공(2,853공), 진출입로 설치(2개소)

홍수방호벽 설치(145m), 둔치 식재 등

□ 계약금액 : 2,067,094천원

□ 공사기간 : ‘16. 08. 26. ~ ‘18. 02. 25.

□ 시 공 사 : 충정종합건설주식회사(감독기관 : 서울시설공단)

2		설계변경 현황

□ 설계변경사유

- 현장여건 반영 등에 따른 실정보고 승인 건에 대한 설계내역 반영

□ 주요변경내용

- 홍수방지벽 현장여건 등 변동사항 반영(감5백만원)

․ 거푸집 변경(합판→유로폼), 교통표지판(10개소) 재활용 등

- 홍수방지벽과 제2경사로 조경분야 변경사항 반영(증20백만원)

․ 홍수방지벽 : 주변 환경에 적합한 식재수종(영산홍→조팝나무)으로 변경

․ 제2경사로 : 둔치 지장 수목(26주) 제거 및 식재(원추리 4,000본) 추가

- 제2경사로 가시설 보완설계와 옹벽 벽체 높이 축소(증11백만원)

․ 신설되는 경사로 형태에 맞도록 옹벽 벽체 높이 축소(2.8m→2.8~0.96m)

․ 옹벽 벽체높이 축소에 따라 전구간 토류판, 띠장, 버팀보 설치에서 필요구간만 설치

․ 장비 진입도로가 없어 중장비 반출입과 폐기물, 토사 등의 크레인 인양 반영

- 제경비(산업안전보건관리비) 계산오류 수정 등(감13백만원)

□ 사전절자 이행

- 공단 설계변경 심의완료(건당 50백만원 이하로 설계변경 소위원회 심의 제외)

□ 설계변경금액

- 총차 1회(공사기간 변경없음)

구 분		금 액(원)
		당 초	변 경	증 ․ (감)
총 공 사 비		2,709,688,000	2,720,507,000	10,819,000
도급비	공 급 가 액	1,879,176,364	1,891,370,000	12,193,636
	부가가치세	187,917,636	189,137,000	1,219,364
	소 계	2,067,094,000	2,080,507,000	13,413,000
관급자재비		642,594,000	640,000,000	(2,594,000)

- 1차 1회

구 분		금 액(원)
		당 초	변 경	증 ․ (감)
총 공 사 비		853,419,536	965,508,100	112,088,564
도급비	공 급 가 액	720,851,819	793,480,000	72,628,181
	부가가치세	72,085,181	79,348,000	7,262,819
	소 계	792,937,000	872,828,000	79,891,000
관급자재비		60,482,536	92,680,100	32,197,564

∙ 사 유 : 실정보고 승인사항 및 시공물량 조정(제1경사로 제외, 제2경사로 및 홍수방지벽의 기 제외된 공종 포함, 식생방틀 추가 등)

∙ 공사기간변경

당 초	변 경
2016. 08. 26. ～ 12. 30.	2016. 08. 26. ～ 2017. 04. 30.
사 유 : 수방기간 이후 단계별 시공과 정비물량 추가(조정)에 따른 공사기간 연기

3		감독기관 의견

□ 실정보고 승인 건에 대한 설계변경 반영 건으로 설계도서 검토결과『적정』함.

4		조치계획

□ 상기와 같이 설계변경(계약금액 조정)하여 공사시행에 만전을 기하고,  계약부서(재무과)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 공단 관련문서 1부.

2. 관련보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 시공사 관련문서 1부. 끝.