문서번호	도시철도토목부-15801
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
서재원		방영복	12/16 김진팔
협 조
	주무관			유원하

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설폐기물처리용역」

준공기한연기 검토보고(총괄5회, 6차1회)

2016. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설폐기물처리용역」

준공기한연기 검토보고(총괄5회, 6차1회)

『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설폐기물처리용역』과 관련하여 9호선 기본계획변경으로 인한 총괄 용역기간조정 및 8차 공사구간 위치변경에 따른 건설폐기물 발생 시기 미 도래로 인한 6차 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거

- 지하철 9호선 3단계 기본계획변경 승인 알림

【도시철도토목부-14391(‘16.11.18.)】

- 918공구 건설폐기물처리용역 준공기한연기 검토보고(총괄5회, 6차1회)

【서영 건설관리 제2016-838호(‘16.12.08.)】

1		사 업 개 요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설폐기물처리용역

○ 계약금액 : 581,876천원(6차 : 30,000천원)

○ 용역기간 : ‘10.08.27. ~ ‘16.12.31.(6차 : ‘16.03.01. ~ ‘16.12.31.)

○ 용역내용 : 건설폐기물 운반 및 처리

○ 처 리 자 : 삼환환경㈜ 대표이사 강재성

2		계 약 현 황

○ 총괄 및 6차 계약현황

구 분	수 량(ton)		금액(천원)	기 간	비 고
	폐콘크리트	폐아스콘
총 괄	15,971	17,703	581,876	‘10.08.27. ~ ‘16.12.31.
기 준공 (1~5차)	13,624	16,291	515,876	‘10.08.27. ~ ‘16.02.29.
6 차	1,494	167	30,000	‘16.03.01. ~ ‘16.12.31.
장 래	853	1,245	36,000

3		변 경 내 용

○ 총괄(5회)

구분	계약기간	폐기물운반․처리수량(ton)		금액(천원)	비고
		폐콘크리트	폐아스콘
당초	‘10.08.27.~‘16.12.31.	15,971	17,703	581,876
변경	‘10.08.27.~‘18.12.31.	15,971	17,703	581,876
증감	증730일	변경없음	변경없음	변경없음

- 지하철 9호선 기본계획변경(국토교통부 고시 제2016-713호)에 따라 현재 진행 중인 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설폐기물처리용역』의 총괄 준공기한을 변경(2016.12.31. → 2018.12.31.)

○ 6차(1회)

구분	계약기간	폐기물운반․처리수량(ton)		금액(천원)	비고
		폐콘크리트	폐아스콘
당초	‘16.03.01.~’16.12.31.	1,494	167	30,000
변경	‘16.03.01.~‘17.12.31.	1,494	167	30,000
증감	증365일	변경없음	변경없음	변경없음

- 8차 공사구간 위치변경(본선 개착1구간 및 정거장 set back구간 제외)으로 인한폐기물 발생시기 미 도래에 따라 6차 폐기물 처리용역의 준공기한을 연기(2016.12.31.→ 2017.12.31.)

4		책임감리원 검토의견

○ 지하철 9호선 기본계획변경(국토교통부 고시 제2016-713호)에 따라 현재 진행 중인 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 건설폐기물처리용역』의 총괄 준공기한을 변경(2016.12.31. → 2018.12.31.)함이 타당한 것으로 판단되며,

○ 8차 공사구간 위치변경(본선 개착1구간 및 정거장 set back구간 제외)으로 인한 폐기물 발생시기 미 도래에 따라 6차 건설폐기물처리용역 기간을 수량 및 금액변경 없이 연기함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조 치 계 획

○ 책임감리원 의견과 같이 9호선 기본계획변경에 따른 총괄 용역기간을 공사완료 예정인 2018.12.31.까지 변경하고,

○ 6차 용역에 대하여는 폐기물 발생시기 미 도래에 따라 수량 및 금액변경 없이 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

- 폐기물처리용역 기간 변경(총괄5회, 6차1회)

구분		계약기간	폐기물운반․처리수량(ton)		금액(천원)	비고
			폐콘크리트	폐아스콘
총괄 (5회)	당초	‘10.08.27.~‘16.12.31.	15,971	17,703	581,876
	변경	‘10.08.27.~‘18.12.31.	15,971	17,703	581,876
6차 (1회)	당초	‘16.03.01.~‘16.12.31.	1,494	167	30,000
	변경	‘16.03.01.~‘17.12.31.	1,494	167	30,000

붙 임 : 1. 감리검토의견서 및 준공기한연기원(총괄5회, 6차1회) 각 1부.

2. 변경내역서(총괄5회, 6차1회) 각 1부.

3. 합의각서(총괄5회, 6차1회) 1부.

4. 관련공문 1부.  끝.