문서번호	계획설계과-10707
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
최영서	이임섭	12/19 이규상
협 조

『우면산가압장 급수체계 개선』 세출예산 사고이월 보고

2016. 12.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우면산가압장 급수체계 개선』

세출예산 사고이월 보고

우리 본부에서 추진 중인 「우면산가압장 급수체계 개선」 사업과 관련 사고 이월 사유가 발생하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 우면산가압장 급수체계 개선

□ 사업규모

○ 암사저양정 송수펌프 교체 7대, 양재가압장 설치 1식

○ 송배수관 부설 D=1200mm, L=362m

□ 총사업비 : 9,675백만원(사업기간 : 2016년~2018년)

□ 2016년 사업내용

○ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역

- 용역기간 : 2016. 5. ~ 2017. 2.     - 계약금액 : 금283,107천원

○ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 지반조사 용역

- 용역기간 : 2016. 5. ~ 2016. 11.    - 계약금액 : 금15,257천원

Ⅱ		예산집행 내역

□ 예산과목

○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

□ 집행내역

(단위 : 천원)

예산액	예산현액	배정액	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액	불용액
347,000	347,000	346,120	298,364	241,742	56,622	48,636

※ 불용액 : 추산잔액 893천원, 낙찰차액 47,743천원

Ⅲ		사고이월 사유

□ 기본 및 실시설계 용역 준공기한이 당초  2016. 12.까지였으나

2017. 2.까지 연장 사유 발생

○ 말죽거리공원에 설치하는 양재가압장과 관련하여 공원 관리 부서와 업무 협의가 늦어짐

○ 설계 경제성등 검토 지연

- 설계VE 요청 ’16. 11. 4. →  설계VE 검토회의 개최 ’16. 11. 29.

Ⅳ		조치의견

□ 기본 및 실시설계 용역이 금년도에 준공이 불가하므로 사고이월 조치코자 함

붙  임 : 사고이월 사업별 명세서 1부.  끝.