문서번호	방재시설부-20159
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이석근		이도헌	12/19 임춘근
협조

『신상도 지하차도 확장공사』

도시계획시설(도로)실시계획(변경)인가고시

도서작성비 설계반영

2016. 12.

도시기반시설본부

방재시설부

신상도 지하차도 확장공사

도시계획시설(도로)실시계획(변경)인가고시

도서작성비 설계반영

신상도 지하차도 주변 대광·청학빌라 진입을 위한 부체도로 종단계획 변경 보완

설계가 완료되어 이에 따른 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가고시 절차

이행을 위한 도서작성이 필요함.

공사개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 상도동 159-21~207-5간

○ 규    모 : 도로확장 2차로→4~6차로 L=324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, L=230m)

○ 공사기간 : ′07.12.31. ~ ′18.12.31

○ 도 급 비 : 11,762,278천원(5차 61,435천원)

○ 시 공 사 : (유) 한백종합건설 외 1

보고내용

○ 관련근거

- 방재시설부-12095(2016.08.02)

· 부체도로 종단계획 변경 검토보고(보완설계시행)

- 도로계획과-17345(2016.12.02)

· 도시계획시설(도로)실시계획(변경)인가 도서작성제출요청

○ 대광·청학빌라 진입을 위한 부체도로 종단계획변경에 따라 보완설계를 추진

하여 완료하였으며,

○ 2006.11. 기 고시된 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가고시된 토지 및

물건지 변경없으나 금회 추가되는 대광·청학빌라건물 및 대지부분에 대한

실시계획인가 도서작성이 필요함.

〈보상건물 전경 및 배치도〉

대광빌라 상가동, 나동	대광빌라 가동	청학빌라

조치의견

○ 최저가 견적서 제출업체인 ㈜건인이엔씨로 하여금 실시계획인가 도서를 작성토록

하고 도서작성비는 본 공사 계약내역에 반영하여 설계변경 반영조치코자 함.

※ 도시계획시설(도로)실시계획인가 도서작성비 산출

업체명	㈜건인이엔씨	㈜경인	㈜디엠씨티	비고
도서작성비	10,000,000원	12,000,000원	13,500,000원	VAT별도
적 용	◎

붙임  1)관련공문서 사본 1부.

2)부체도로 종단계획 변경보고서 1부. 끝.