함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	고도정수처리 시험운전 협조 요청

1. 본부가 추진중인 고도정수처리시설공사와 관련 시험운전 일정을 아래와 같이 알려드리니 적극 협조하여 주시기 바라며,

2. 시험운전에 앞서 T/F팀(본부+정수센터) 구성을 위한 분야별 담당자를 지정 2014.3.28일 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

◦ 분야별 T/F 담당자

구분	총괄	운영	수질	전기/계측	기계	고압가스	토목/건축	비고
직급
성명

◦ 시험운전 예상일정

- 2014. 3. 25 : 도급공사비에서 계약금액 감액 조정

- 2014. 4. 01 : 종합시험운전 계약의뢰

- 2014. 5. 01

▪종합시험운전 계약

▪ 시운전 T/F팀구성(본부,정수센터,시운전업체)

▪ 외부, 내부(본부, 사업소) 합동점검계획 수립

- 2014. 5. 10 : 고도처리 시험운전업체 세부계획서 제출(본부)

- 2014. 5. 10 ~ 5. 30 : 고도처리 시험운전업체 시설물 사전 파악

- 2014. 6. 1 ~ 11. 31 : 고도처리 시험운전실시

※ 정수센터에서는 과업지시서에 의거 법정인력(고압가스업무)확보.

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 과업지시서(강북, 암사) 각1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	03/19 박용철
협조자
시행	기전설비과-1838	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개