투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산)시행

1. 2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이

설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016.2.22 ~ 2016.12.31

다. 도 급 자 : *****************

라. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 한강교량 및

도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비

마. 설계변경내역

[ 단 위 : 원 ]

구 분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
총공사비	34,951,180	34,268,400	감 682,780
도 급 비	34,951,180	34,268,400	감 682,780

바. 설계변경 사유 : 작업지시에 따른 주요물량 변경사항(증,감)반영 및

보험료(건강,연금,노인장기요양)정산에 따른 감액.

붙 임 : 1. 설계변경 계획 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	하상철		주무관	한영호		기전과장	12/19 박재경
협조자	주무관	정안숙		관리단속과장	이희천
시행	기전과-16610	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7979	/전송	02-2657-7939	/		/	부분공개(6)