투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	도로보수과장
(경유)
제목	교통신호기 공사일정 변경 알림

1. 강남구 공원녹지과-35919호(2016.12.15)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 2016년 동부 1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련하여 아래와 같이 공사일정 변경을 알려드립니다.

가. 공사장소

- 몰테니앤씨 앞(강남구 논현동 논현로 713)

- Home Deco 앞(강남구 논현동 논현로 713)

나. 공사일정 변경

- 당초 : 2016년, 변경 : 2017년

다. 공사일정 변경 사유

- 강남구청 공원녹지과에 교통신호기 공사에 따른 띠녹지 철거를 요청(2016.11.22.) 하였으나 원인자(동부도로사업소) 부담으로 띠녹지 이식작업을 시행하라는 회신이 있어 2017년  관련 부서와 재협의하여 공사시행코자 함을 알려드립니다.   끝.

	기전과장
주무관	김기중		기전과장	12/19 최태용
협조자
시행	기전과-16067	(		)	접수		(		)
우	06332	서울시 강남구 남부순환로 3142-33	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0361	/전송	02)2040-0365	/	sun789@seoul.go.kr	/	대시민공개