문서번호	도로보수과-13037
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	12/19 김용제
협조

설계변경 검토보고 (정산)

[2016년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사]

2016. 12.

강서도로사업소

[도로보수과]

설계변경 검토보고

공사시행 중 발생한 물량 증·감 및 공종 추가·변경에 따른 설계

변경을 시행하고 정산처리하고자 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016. 03. 22. ~ 2016. 12. 31.

○ 공사개요 : 과속방지턱 도색 400㎡, 콘크리트 단면보수 290㎡, 균열보수 390㎡

중앙분리대 철거 400경간, 시선유도봉 설치 1070개 등

○ 도 급 액 : 337,040,000원

○ 도 급 자 : ㈜비성건설 임윤정

설계변경 사유

○ 도로 및 교통안전부속물 자체순찰에 따른 적출, 120민원, 관할경찰서의

정비 및 설치 요청에 따른 물량증감 반영 및 신규공종 추가

주요 물량 변경 내역(안)

연번	변경사유	공 종	규 격	단위	변경전	변경후	증	감
1	물량증감	과속방지턱 도색	-	㎡	400	557	157
2	물량증감	시선유도봉 설치	200*80*750	개	1000	1022	22
3	물량증감	시선유도봉 철거	-	개	500	305		195
4	물량증감	시선유도봉 설치	200*80*450	개	50	75	25
5	물량증감	충격방지탱크 설치	-	개	3	4	1
6	물량증감	가드레일 보수	-	경간	7	2		5
7	물량증감	가드레일 판 교체	-	매	24	45	21
8	물량증감	가드레일 단부 교체	-	개소	5	6	1
9	물량증감	시설물 세척	-	㎡	7775	10749	2974
10	물량증감	자전거도로 방호울타리 설치	-	경간	5	8	3
11	물량증감	자전거도로 방호울타리 철거	-	경간	11	12	1
12	물량증감	무단횡단금지시설 설치	H900✕W2000	경간	40	89	49
13	물량증감	무단횡단금지시설 보수	가로봉 보수	개	60	46		14
14	물량증감	보차도 경계석 설치[주간]	250*300*1000	m	10	3		7
15	물량증감	보차도 경계석 설치[야간]	250*300*1000	m	120	32		88
16	물량증감	보도블럭 포장	-	㎡	100	0		100
17	물량증감	장애인유도블럭 포장	300*300*6	장	60	9		51
18	물량증감	도로표지병 설치	일반단면	개	613	586		27
19	물량증감	도로표지병 설치	일반양면	개	1234	1417	183
20	물량증감	도로표지병 철거	-	개	569	535		34
21	물량증감	갈매기표지 설치	10*45, 토공용	개	19	21	2
22	신규공종	도로반사경-지주식 설치	100	개	0	1	1
23	신규공종	콘크리트방호벽 체결	136	개	0	136	136
24	신규공종	노측용 개방형가드레일(라운드) 설치	주간	경간	0	1	1
25	신규공종	노측용 개방형가드레일 철거	주간	경간	0	198	198
26	물량증감	노측용 개방형가드레일 철거	야간	경간	320	123		197
27	신규공종	무단횡단금지시설 재사용 설치	관급자재 사용	경간	0	29	29
28	신규공종	무단횡단금지시설 철거	-	경간	0	38	38
29	신규공종	U형 볼라드 설치	101.6*1200	개	0	3	3

※신규공종에 대하여 낙찰율(87.774%) 적용

설계 변경 내역(안)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		550,029,860	547,878,130	감)	2,151,730
도급비	공 급 가 액	306,400,000	302,700,000	감)	3,700,000
	부가가치세	30,640,000	30,270,000	감)	370,000
	계	337,040,000	332,970,000	감)	4,070,000
관 급 자 재 비		212,989,860	214,908,130	증)	1,918,270
이전비 및 기타		0	0	-

조치의견

○ 상기와 같이 물량변경 및 신규공종 추가에 따른 설계변경(정산)을 시행

하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  끝.