문서번호	기전과-16601
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	강서도로사업소장
하상철	代하상철	박재경	12/19 김용제
협 조

2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

강서도로사업소

기전과

- 2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(정산) 계획보고

2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)에 대하여 기존 계약물량 변경등으로 인한 설계변경(정산) 사유가 발생하여 설계변경(정산) 시행코자 아래와 같이 보고합니다.

공 사 현 황

□ 공 사 명 : 2016년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 공사개요 : 한강교량 경관조명 유지관리 1식

□ 도 급 자 : *****************

□ 계약금액 : 금34,951,180원

□ 공사기간 : 2016. 02. 22 ~ 2016. 12. 31

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비고
		당초	변경	증 . 감
총 공 사 비		34,951,180	34,268,400	(감) 682,780
도급액	공사원가	31,773,800	31,153,091	(감) 620,709
	부가가치세	3,177,380	3,115,309	(감) 62,071
	계	34,951,180	34,268,400	(감) 682,780

설계변경 사유

□ 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험) 및 부대경비

정산에 따른 감액

정산내용

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	금액(증,감)	사 유	비 고
재료비	12,408,692	6,246,130	감)6,162,562	보험료 미납부 및 부대경비 감액
노무비	11,645,267	15,685,024	증)4,039,757
경 비
산출경비	1,163,585	2,664,502	증)1,500,917
산재보험료	442,520	596,031	증)153,511
고용보험료	101,314	136,460	증)35,146
기타경비	1,491,345	1,359,732	감)131,614
건강보험료	203,448	0	감)203,448
연금보험료	297,991	0	감)297,991
노인장기요양보험	13,326	0	감)13,326
일반관리비	1,666,049	1,601,273	감)64,777
이윤	2,340,263	2,863,941	증)523,678
공급가액	31,773,800	31,153,091	감)620,709
부가가치세	3,177,380	3,115,309	감)62,071
도급공사비	34,951,180	34,268,400	감)682,780
총공사비	34,951,180	34,268,400	감)682,780

조치 의견

□ 상기 변경사유와 같이 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료의      미납부로 인한 부대경비(금액 682,780원) 감액부분 및 낙찰률 87%를     반영한 사항으로 물량 증, 감 사항이 적정하게 반영되었다고    사료됨으로 설계변경(정산) 시행하고 준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.