개방·공유·소통·협력의 열린 중구3.0
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 도로굴착복공사 설계변경 시행(3차)

우리 구에서 시행중인 『2016년 도로굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행(3차) 하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 도로굴착복구공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2016. 3. 11.~ 2016. 12. 31.

3. 도 급 자 : ㈜ 백두이엔지  대표 김재기

4. 설계변경 내역                                                 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	816,685,860	920,524,000	증103,838,140
도 급 비	456,685,860	542,270,000	증 85,584,140
관 급 비	252,000,000	256,715,000	증 4,715,000
이 전 비	108,000,000	121,539,000	증 13,539,000

5. 설계변경 사유

- 실공사 시행에 따른 공종 및 물량 변경 등 사항 반영에 따른 변경  및 시공물량 증·감 발생

6. 예산과목

- 도로, 도시기반시설확충, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비,

시설비

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.

3. 설계변경 보고서 1부

4. 계약심사 결과 1부.  끝.

도로굴착팀장							황인수			도로시설과장					代박제혁					안전건설국장					전결 12/19 代류웅걸
협조자				주무관						김향희					계약팀장							문애숙					재무과장							代변혜경
시행			도로시설과-18603									(	2016.12.19					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관7층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6121						/전송			02)3396-8843					/	bulbang@junggu.seoul.kr												/	대시민공개