등록번호	시장경제과-54239		주무관		경제진흥팀장		시장경제과장		기획재정국장
등록일자	2016.12.19.
			박은혜		김송희		최인태		12/19 한수경
결재일자	2016.12.19.
공개구분	대시민공개
			협 조
인쇄특정개발진흥지구 지정 및 진흥계획 수립 연구용역 준공기한 연장 계획
기획재정국 시장경제과

인쇄특정개발진흥지구 지정 및 진흥계획 수립

연구용역 준공기한 연장 계획

중구 인쇄산업 육성을 위한 인쇄특정개발진흥지구 지정이 서울시 도시계획위원회 상정 절차 진행중으로 완공까지 상당한 시일이 소요되어 용역기한을 연장하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 인쇄특정개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획

수립을 위한 연구 용역

○ 용역개요

- 추진근거 : 구청장 방침(지역경제과-47024, 2011.10.6.)

- 용역기간 : 2011.2 ~ 2016. 12.

- 용역내용

· 충무로·인현동·을지로·오장동 일대 인쇄특정개발진흥지구 지정 추진

· 인쇄특정개발진흥지구 진흥계획 수립

○ 계약체결

- 계약방법 : 일반경쟁 입찰계약

- 계 약 자 : ㈜도시미래종합기술공사 외 1

Ⅱ		준공기한 연장 내역

○ 기한 연장 : (당초) 2016. 12. 31 → (변경) 2017. 12. 31

○ 연장 사유 : 인쇄특정개발진흥지구 지정 절차 진행중으로 완공까지 상당한 시일이 소요되어 연장

○ 연장사유 귀책 소재 : 중구청

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		추진경과 및 향후 계획

▨ 추진 경과

○ 2015.3.31. : 중구인쇄특정개발진흥지구 대상지 변경 승인 (서울시)

○ 2016.2.24. : 구의회 의견 청취(원안 가결)

○ 2016.3.31. : 구 도시계획위원회 자문(원안 가결)

○ 2016.4.20. : 중구 인쇄산업발전 협의체 구성 및 회의 개최

○ 2016.5. 3. : 서울시 도시계획위원회 진흥지구 지정 심의 의뢰

○ 2016. 5.   : 도시관리계획 결정에 대한 보완 통지 (서울시→중구

○ 2016.5.24. : 중구 인쇄업 대표자 간담회 및 사업 홍보

○ 2016. 6.   : 전략환경영향평가 관련 환경부 협의 (중구↔환경부)

○ 2016.6.22. : 인쇄산업 활성화 방안 간담회(서울시 경제정책과장 외)

○ 2016.7. 1. : 민선6기 구청장 취임2주년 현장방문간담회 개최

○ 2016.7.26. : 중구 인쇄산업발전 협의체 2차 회의 개최

○ 2016. 9.   : 도시관리계획 결정에 대한 보완 제출 (중구→서울시)

○ 2016.12. 서울시 관계부서(6개) 의견 조회(경제정책과, 교통행정과,

역사도심재생과, 도시관리과, 시설계획과, 도시계획상임기획단)

▨ 향후 계획

○ 2017. 1. : 서울시 관계부서 의견 보완 서울시 제출

○ 2017. 2. : 서울시 의회 의견 청취

○ 2017. 3. : 서울시 도시계획위원회 개최 및 심의 의결

○ 2017. 3. : 진흥지구 지정 결정 및 고시

○ 2017. 4. : 진흥계획 수립을 위한 자문위원회 회의 개최(시장경제과)

○ 2017. 5. : 진흥계획 수립(시장경제과)

○ 2017. 6. : 주민공람 및 구의회 보고(시장경제과)

○ 2017. 7. : 진흥계획 실무위원회 검토의뢰(시장경제과⇒서울시 경제정책과)

○ 2017. 9. : 진흥계획 심의위원회 심의의뢰(시장경제과⇒서울시 경제정책과)

○ 2017.10. : 진흥계획 승인(서울시)

○ 2017.11. : 진흥계획 고시(구).  끝.