등록번호	주차관리과-38252		주무관		주차시설팀장		주차관리과장		안전건설국장
등록일자	2016.12.19.
			주기종		김광태		박수돈		전결 12/19 代류웅걸
결재일자	2016.12.19.
공개구분	대시민공개
			협조	★건축시설팀장		이종권
				건축과장		이기봉
다산동 성곽길주변 공영주차장건립 교통영향평가 용역계획
안전건설국 주차관리과

다산동 성곽길주변 공영주차장건립

교통영향평가 용역계획

다산동 성곽길주변 공영주차장 건립 최종 건축연면적이 교통영향평가 대상사업에 해당함에 따라 교통영향평가 용역 시행 후 우리구 건축위원회 건축․교통 통합심의를 득하고자 함

1		추진근거

❍「다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사 설계용역」설계변경 검토 보고

(건축과-28100,2016.12.8.)

❍「서울특별시 교통영향평가에 관한 조례 시행규칙」제2조〔별표]

(교통영향평가 대상사업의 범위 등)

2		사업개요

구 분	다산동 성곽길주변 공영주차장
위 치	신당동 826-1외 33필지
사업내용	부지면적 : 4,275.3㎡ 연면적 : 11,975.48㎡ 규 모 : 지하4층/지상3층 주차면수 : 200면 (지상1~3층 문화시설) 사업비 : 약318억원 (시비 137억원, 구비 181억원)

3		교통영향평가 대상여부 판단

【복합용도 건축물】

건축 연면적의 합계(Swa)가 1만㎡ 이상인 복합용도의 건축물 신축은

교통영향평가 수립 대상

Swa =  × 10,000

□ Pia : 각 건축물의 용도별 건축 연면적의 합계(㎡)

□ Mia : 각 건축물의 최소 교통영향평가 수립 대상규모(㎡)

※ 교통영향평가서의 제출․심의시기 :「건축법」제11조에 따른 허가전으로 하되

개별법에 따라 시행하는 건축물의 경우에는 그 건축물 건축을 위한 해당법령에 따른

인가・허가 전까지로 한다.

❍ 다산동 성곽길주변 공영주차장 : 심의대상

구분	연면적	대상사업의 범위(최소기준)		심의대상여부 (Swa = 10,000㎡ 이상)
		도시교통정비촉진법	서울시조례
자동차 관련시설	9,580.50㎡	13,000㎡이상	10,000㎡이상 13,000㎡미만	심의대상 (Swa = 12,574.22㎡)
2종근생 문화및집회	2,394.98㎡	15,000㎡이상	8,000㎡이상 15,000㎡미만
합계	11,975.48㎡

4		용역개요

❍ 용 역 명 : 다산동 성곽길주변 공영주차장 신축 교통영향평가

❍ 용역내용(교통영향평가 보고서)

- 교통환경조사 분석, 사업지구 및 주변지역의 장래 교통수요

- 사업의 시행에 따른 문제점 및 개선대책, 교통개선대책안의 시행계획 등

❍ 용역기간 : 계약일로부터 90일

※ 교통영향평가 심의를 득한 경우 준공 처리

❍ 계약방법 : 수의계약(전자계약 가능)

❍ 계약근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호 및 제30조1항

❍ 계약대상업체

- 업체명 : ㈜미래월드이엔씨

- 사업자등록번호 : 511-88-00075(종목: 교통엔지니어링)

- 대표자 : 임동주(*************, 02-325-9688)

- 주  소 : 서울시 마포구 방울내로 76 동우B/D 301호(망원동)

❍ 수의계약사유

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거 예정 용역비가 2천만원 이하이며, 시급성과 원활한 용역진행을 위해 중구지역 교통관련용역을 시행한 업체와 수의계약

4		소요예산

❍ 용역금액 : 약22,000천원(부가세 포함)

❍ 예산과목

- 교통질서확립과주차시설확충, 주차시설운영, 공영주차장건립, 시설비및부대비, 시설비(2016년 명시이월)

5		추진일정

❍ 2016.  12월 : 공영주차장건립 교통영향평가 용역계획 수립

❍ 2016.  12월 : 계약심사(감사담당관)

※용역금액 2,000만원(부가세포함)이상 계약심사 대상

❍ 2017.   1월 : 교통영향평가 용역업체 계약

❍ 2017. 1~2월 : 건축위원회 교통․건축 통합심의(우리구)

※「건축법」제4조에 따른 건축위원회(교통위원 1/4이상 참석) 건축심의 대상

❍ 2017.  3월 : 교통영향평가 용역준공(최종 보고서 납품)