개방·공유·소통·협력의 열린 중구3.0
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물처리용역 설계변경 시행(1차)

우리 구에서 시행중인 『2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행(1차) 하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 도로굴착복구공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)

2. 공사기간 : 2016. 4. 7.~ 2016. 12. 31.

3. 도 급 자 : 태성용아건설개발(주) 대표 윤영석, 동아공사(주) 대표 박종기

4. 설계변경 내역                                                 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	87,766,000	121,539,000	증33,773,000
도 급 비	87,766,000	121,539,000	증33,773,000

5. 설계변경 사유

- 굴착복구공사 물량증가에 따른 건설 폐기물 물량증가로 인한 변경

6. 예산과목

- 도로, 도시기반시설확충, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비

시설비

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.  끝.

도로굴착팀장							황인수			도로시설과장					代박제혁					안전건설국장					전결 12/19 代류웅걸
협조자				주무관						김향희					계약팀장							문애숙					재무과장							代변혜경
시행			도로시설과-18550									(	2016.12.19					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관7층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6121						/전송			02)3396-8843					/	bulbang@junggu.seoul.kr												/	대시민공개