문서번호	토목부-26192
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	12/19 김영수
협조
	주무관		장종환

건설폐기물(소각, 혼합)설계변경(전체5회, 4차2회)및 준공기한 연기

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

도시기반시설본부

토목부

건설폐기물(소각, 혼합)설계변경(전체5회, 4차2회)및 준공기한 연기

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의거 분리 발주하여 시행중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 건설폐기물 처리용역에 대한 설계변경 및 용역기간 연장 사유가 발생하여 검토 보고 드림

※ 관련근거 : 동기공 2016-5093호(2016.12.12.)

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 건설폐기물(소각,혼합)처리용역

❍ 용역규모 : 소각폐기물 1,158톤, 혼합폐기물 743톤

❍ 용역기간 : `12.04.05.~`17.05.30.(4차 `16.01.01.~`16.12.31.)

❍ 용역금액 : 금208,290천원 (4차: 금50,727천원)

❍ 계 약 자 : ㈜진흥중공업  대표 박찬양

2		폐기물 수량 및 용역비 현황

구 분	예 산 (천원)	수 량(TON)			비 고
		소각폐기물	혼합폐기물	계
총 괄	208,290	1,158	743	1,901
1차 (기 준공)	64,000	267.92	481	748.92
2차 (기 준공)	4,000	17	29.4	46.4
3차 (기 준공)	89,563	535.65	211.15	746.8
4차 (금 회)	50,727	337.43	21.45	358.88

3		설계변경 내용

❍ 물량 변경 현황

(단위: 톤)

구 분		소각폐기물	혼합폐기물	비 고
전체	당 초	1,158	743
	변 경	1,253	810
	증･감	증) 95	증) 67
4차 (2회)	당 초	337.43	21.45
	변 경	415.91	86.35
	증･감	증) 78.48	증) 64.9

❍ 용역비 및 기간 변경 현황

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
전체	당 초	208,290,000	2012. 4. 5.	2017. 5. 30.
	변 경	225,691,000	2012. 4. 5.	2018. 5. 30.
	증･감	증) 17,401,000		증 365일
4차 (2회)	당 초	50,727,000	2016. 1. 1.	2016.12.31.
	변 경	65,592,000	2016. 1. 1.	2016.12.31.
	증･감	증) 14,865,000		-

❍ 설계변경 사유

- 지장물(미림원예, 농협창고) 철거 수량 반영 및 폐기물 수량 정산

- 과천시 구간 도시계획시설 편입 건물(주암동 18-5, 18-8) 명도 진행에 따른 철거 지연과 제2염곡지하차도 도로점용공사 시 교통전환을 위한 도로확장 지연으로 용역기간 연장

❍ 연기 귀책소재 : 시행청

❍ 지체상금 부과 : 미부과

4		조치계획

❍ 상기 책임건설사업관리기술자의 보고 내용과 같이 추가 물량을 반영하고, 과천시 구간 보상건물 철거 지연과 염곡사거리 도로확장 지연으로 계약기간 내 처리가 어려운 바, 폐기물 발생 공정에 맞춰 기간 연장하여 폐기물 처리용역에 만전을 기하고자 함.

❍ 본 공사 구간의 지장물 철거 미착수에 따른 용역기간 연장

- 총괄 : 2017.05.30.→ 2018.05.30.(증 365일)

- 4차 : 2016.12.31.→ 2016.12.31.(변경없음)

붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.