투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	설계변경(증액) 계약의뢰(목동운동장 휴게쉼터 설치공사)

1. 목동사업과-13607호(2016.11.09.)의 관련입니다.

2. 위호 관련 『목동운동장 휴게쉼터 설치공사』건에 대하여 다음과 같이 설계변경(증액) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

**************************

***************************************

****************************************************

***************************************************

마. 변경내용 : 느티나무 수근부분 및 수평점 상승으로 데크물량 증가

데크 높이 상승으로 난간대 설치

바. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장및신월야구공원시설물 개․보수, 시설비및부대비, 시설비

사. 설계변경(증액) 내용                         (원단위 절사)

당초금액(원)	변경금액(원)	증. 감(원)	변경사유
43,751,640	51,275,140	7,523,500	설계변경,미집행된 건강,연금보험료 정산

붙임 1) 계약금액정산 검토보고서 1부

2) 설계변경내역서 1부

3) 현장실정 보고자료 1식.  끝.

	목동사업과장
★주무관	송점서		주무관	代김현오		목동사업과장	12/19 代정남영
협조자	주무관	박동호
시행	목동사업과-15337	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2640-3835	/전송	02-2649-7145	/	sjs1082@seoul.go.kr	/	부분공개(7)