부 장		12/19 박동룡		과 장	김상우	심사자	위성환	설계자	조규영		설 계	심 사		결 재
											2016년 12월 일	2016년 12월 일
변 경 설 계 서(8차 2회)
	용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 2공구(8차2회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					543,500,000				868,500,000			증)325,000,000
	도급비		공 급 가 액			471,090,910				731,545,455			증)260,454,545
			물 가 변 동			23,000,000				58,000,000			증)35,000,000
			소 계			494,090,910				789,545,455			증)295,454,545
			부 가 가 치 세			49,409,090				78,954,545			증)29,545,455
			계			543,500,000				868,500,000			증)325,000,000
< 용역개요 > ○ 총 연 장 : 3,233m [본선개착 1,977m, 터널 1,007m, 정거장 4개소) ○ 감리기간 : 2016.03.01 ~ 2017.01.31. → 2016.03.01. ~ 2017.09.30 < 설계변경 사유 > ○ 공기 연장에 맞추어 상주감리원 배치계획 변경