문서번호	시설과-10951
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		경영관리부장
최이영	代송병욱	강신재		12/19 정진일
협 조

「국사봉 및 사당배수지 건설공사」

건설사업관리용역 설계변경에 대한 보고

2016. 12.

상수도사업본부

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「국사봉 및 사당배수지 건설공사」

건설사업관리용역 설계변경에 대한 보고

건설사업관리 용역 착수일 지연에 따른 용역기간 감소로 발생된감액 설계변경을 보고드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역

○ 용역대상 : 국사봉 배수지 12,000㎥(D=700~800㎜, L=3.0㎞)

사   당 배수지   5,000㎥(D=300~500㎜, L=1.7㎞)

○ 용역기간 : 전체분 ’16.12. 5.~’19. 5. 23.

1 차분 ’16. 12. 5.~’16. 12. 31.

○ 계약금액 : 전체분 1,560,000천원

1 차분     39,805천원

○ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

□ 검토내용

○ 건설사업관리용역 계약서상 착수일 ‘16.12. 5. 보다 늦은 ‘16. 12. 8.자로 실제 착수함에 따라 용역기간 감소(3일)로 발생된 건설사업관리 기술자 투입인원 감 조정에 대한 설계변경을 시행코자 함.

□ 조치의견

○ 국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역 1차분 설계변경

- 계약금액

· 전체분 : 전체분 1,560,000천원(변경없음)

· 1 차분 : (당초)39,805천원 ⇒ (변경)36,597(감3,208천원)

- 계약기간

· 전체분 : ’16. 12. 5.~’19. 5. 23.(변경없음)

· 1 차분 : ’16. 12. 5.~’16. 12. 31.(변경없음)

붙임 : 설계변경 내역 1부. 끝.