문서번호	도로보수과-12656
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
권순회		이상하	12/19 이규철
협조

『2016년 굴착복구 노면표시공사 설계 및 감리용역』 설계변경(제1회-정산) 검토보고

2016. 12.

서부도로사업소

[도로보수과]

『2016년 굴착복구 노면표시공사 설계 및 감리용역』

설계변경(제1회-정산) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 「2016년 굴착복구 노면표시공사 설계 및 감리용역」과 관련하여 도로굴착 구간 노면표시공사 시공물량 증·감 및 도로굴착복구 시행도로 추가에 따른 설계변경 사항을 검토하고 결과를 보고 함.

용역개요

구분	설 계 용 역	감 리 용 역
용역명	2016년 굴착복구 노면표시공사 설계용역	2016년 굴착복구 노면표시공사 감리용역
도급사	㈜트래픽스 대표 김희수	㈜트래픽스 대표 김희수
용역기간	2016.03.22.~ 12.31	2016.03.22.~ 12.31
용역규모	차선도색 상세도 작성 45장	노면표시 감리용역 1식
총공사비	금4,430,250원(도급비)	금1,936,000원(도급비)

설계변경사유

설계용역	감 리 용 역
변경없음.	연번	변 경 사 항	관 련 근 거
	1	<도로굴착 사후도로 정비구간 대상물량 포함시행> 1. 굴착복구 시행도로 노면표시 정비물량 포함시행으로 인한 감리비 증 발생	도로보수과-5768호(‘16.6.20) “2016년 도로굴착복구 시행도로 정비공사 시행계획”
		2. 2015년 동공탐사 원인조사 계획에 의거 노면표시 포함으로 인한 감리비 증 발생	도로보수과-6277호(‘15.7.1) “2015년 동공탐사 원인조사 계획”
	2	<도로굴착복구 구간 노면표시공사 시공물량 증·감> 관리청복구 의뢰물량 감소로 노면표시 시공물량 증감 관리청복구 구간 노후포장도로 병행공사로 증감	-

설계 변경금액

◦ 설계용역 설계변경 : 변경없음.

◦ 감리용역 설계변경 금액

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총용역비		1,936,000원	4,325,000원	증) 2,389,000원
도급비	공급가액	1,749,091원	3,907,273원	증) 2,158,182원
	부가가치세	174,909원	390,727원	증) 215,818원
	손해배상보험료	12,000원	27,000원	증) 15,000원
	계	1,936,000원	4,325,000원	증) 2,389,000원

◦ 예산과목

구 분	예 산 과 목	예 산 액	비고
도로굴착복구	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	8,000천원
계		8,000천원

조치계획

◦ 보고 내용과 같이 설계변경 계약 및 준공처리코자 함.

별첨 : 1) 감리용역 설계변경 내역서(제1회) 1부

2) 관련방침 2부.   끝.