문서번호	시설과-9372
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	김경수	代김경수	12/19 이용태
협 조

『2016년 남산 및 산하공원 폐기물처리용역』

설계변경시행 보고

2016. 12

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2016년 남산및산하공원 폐기물처리용역』

설계변경시행 보고

『2016년 남산 및 산하공원 폐기물처리용역』시행과 관련하여 폐기물 처리대상 공사의 작업지시에 따른 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생으로 폐기물 발생량의 변동에 따른  설계변경 시행.

Ⅰ		공사개요

용 역 명 : 2016년 남산 및 산하공원 폐기물 처리용역

용역개요 : 혼합폐기물(건설) 900톤(25DT,주간)

용역기간 : 2016.05.13. ~ 2016.12.20

계약금액 : 34,556,000원

도 급 자 : ㈜도성개발 박진영, (유)도성환경  윤칠중

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증,(감)	비고
공 사 비		34,556,000	25,400,000	(감) 9,156,000
도급비	공급가액	31,414,545	23,090,909	(감) 8,323,636
	부 가 세	3,141,455	2,309,091	(감) 832,364

남산및산하공원 시설물보수정비사업, 남산및산하공원 시설물보수정비,시설비

설계변경 사유 :

폐기물처리 대상 공사(2016남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사)

및 남산 및 산하공원 유지관리에 따른 발생 폐기물 물량정산

(단위:톤)

구 분	규 격 (24DT)	당 초		변 경		소계	‘16남산및산하공원 시설물공사	남산및 산하공원유지보수 (자체정비)	비고
		운반량	처리량	운반량	처리량
폐콘크리트	주간			83	83	83	83
폐아스콘	주간			190	322	322	322
	야간			132
혼합폐기물	주간	900	900	323	323	323	296	27
계		900	900	728	728	728	701	27

Ⅲ		행정사항

『설계변경 내용』과 관련하여 건설폐기물 운반,처리대상 시설공사

의 물량변동 발생에 따른 폐기물 발생량 처리에 대하여, 설계변경

및 정산 시행에 반영하고자 함

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.