문서번호	기전과-13964
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 12/19 代윤석주
협조

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 5차)

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서부도로사업소

[기  전  과]

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 5차)

실정보고사항 검토보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 5차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 5차 작업지시의 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역) 5차 작업지시 실정보고

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE16A-12-23호(2016.12.19.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역)

○ 공사위치: 서부도로사업소 관내(마포구, 은평구)

○ 공사내용: 교통신호기 신설 및 보수 1식

○ 계약금액: 655,000,000원

○ 공사기간: 2016.3.14. ∼ 2016.12.26.

○ 계약업체: 범한전력공사 대표 박희자

○ 감리업체: 대영유비텍(주)

□ 5차 작업지시개요

○ 작업위치: 은평구 불광초교(연동) 외 7개소

○ 작업지시금액: 13,675,000원

○ 작업지시기간: 2016.12.15. ∼ 2016.12.20.

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: 증 700천원

○ 세부내역

- 은평구 수색역, 갈현1동주민센터: 증 700천원

․음향신호기 관련 설계내역서 및 도면 오류수정

※ 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  감리업체 5차 작업지시 실정보고 1부.  끝.