투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	제1회(최종) 설계변경 시행(2016년 도로굴착복구 노면표시공사 감리용역)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 도로굴착복구 노면표시공사 감리용역』에 대하여 아래와 같이 제1회(최종) 설계변경 시행코자 합니다

가. 공 사 명 : 2016년 도로굴착복구 노면표시공사 감리용역

나. 공사기간 : 2016. 03. 22 ~ 2016. 12. 31.

다. 용 역 비 : 금1,936,000원(도급비)

라. 도 급 자 : 주식회사 트래픽스 대표 김희수

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총용역비	1,936,000	4,325,000	2,389,000
용 역 비	1,936,000	4,325,000	2,389,000
이전비	0	0	0

바. 설계변경 사유

◦ 도로굴착복구 시행토로 공사 및 도로함몰 원인조사 물량 추가 및 굴착복구 물량의 증·감 발생

사. 예산과목

구 분	예 산 과 목	예 산 액	비고
도로굴착복구	도로관리과,도로시설물관리,도로굴착복구,도로굴착복구공사,시설비	8,000천원
계		8,000천원

첨부 1) 설계변경 검토보고서 1부

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	권순회		도로보수과장	12/19 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	윤미란
시행	도로보수과-12668	(		)	접수		(		)
우		서울시 마포구 가양대로 208 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)300-8352	/전송	02)300-8364	/	plpel@seoul.go.kr	/	부분공개(7)