투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 계약 의뢰

1. 시설과-8611(’16.12.19)호와 관련입니다.

2. 『서울대공원 여우늑대사 환경개선 전기공사』 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

-  내         용  -

가. 공 사 명 : 서울대공원 여우.늑대사 환경개선 전기공사

나. 준공기한 변경내용

계 약 자	변경전	변경후	비 고
***** ********	‘16.05.27~12.30	‘16.05.27~`17.4.15	계약금액 변경없음

- 연기사유 : 토목.조경 등 선행 공정인 늑대,여우사 환경개선 공사의 준공기한이

`17.3.31까지 연기됨에 따라 관람대 조명등 설치 등 전기공사 연기가 필요함.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

첨  부 : 방침서(준공기한 연기보고서) 1부.  끝.

	시설과장
전문관	황인공		주무관	이춘한		시설과장	12/19 공헌구
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-8619	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7431	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)