“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	신홍합 창조밸리 청년 창업 주거공간 조성을 위한 구조안전진단 용역 계약기간 연장 및 계약금액 변경 계획 의뢰

‘신홍합 창조밸리 청년 창업 주거 공간 조성을 위한 구조안전진단 용역’추진과 관련하여 구조검토결과 필요한 추가용역을 추진하기 위해 계약기간 연장을 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 변경 내역

계약기간변경	당 초	2016. 11. 02 ～ 12. 21
	변경후	2016. 11. 02 ～ 12. 28(7일 연장)

※ 서울시 요청에 따른 공사기간 연장으로 인한 지체상금 미부과

붙임 1. 계약기간 연장 변경 계획(방침) 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	경제정책과장
주무관	표지은		DMC활성화팀장	윤정권		산업거점조성반장	12/19 代한정훈
협조자
시행	경제정책과-19616	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 경제정책과	/	http://economy.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4833	/전송	02-2133-0881	/	bellroky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)