문서번호	건축부-18036
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김승조		박범규	12/20 김진용
협조	주무관		강철규
	주무관		이광백

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』

배수공 우수빗물받이 변경 실정보고 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

도시기반시설본부

(건 축 부)

세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』

배수공 우수빗물받이 변경 실정보고 검토결과 보고

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』토목공사 관련 감리원으로부터 제출된 실정보고 사항에 대한 검토 결과를 보고 드림

□ 추진경위

○ 2016.11.09. : 배수공 빗물받이 설치 관련 실정보고서 제출

(감리단 ⇒ 도기본, itm 916 제16-0425호)

○ 2016.11.18. : 배수공 빗물받이 설치 실정보고서 보완 요청

(도기본 ⇒ 감리단, 건축부-15989호)

○ 2016.11.18. : 배수공 빗물받이 설치 관련 관계기관 의견 조회

(도기본 ⇒ 종로구․중구, 건축부-15993호)

○ 2016.12.12. : 배수공 빗물받이 설치 관련 관계기관 의견 통보

(도기본 ⇒ 감리단, 건축부-17364호)

○ 2016.12.14. : 배수공 빗물받이 설치 관련 실정보고 재제출

(감리단 ⇒ 도기본, itm 916 제16-0492호)

□ 관련근거

○ 감리단 실정보고

- 실정보고 검토의견서(감리자) : 배수공 우수빗물받이 변경 실정보고 검토의 건

: 아이티엠코퍼레이션(itm 916 제16-0492호, 2016.12.14)

□ 변경사유

○ 야간작업에 따른 변경

- 빗물받이 설치(현장타설 ⇒ 프리캐스트) 변경, 현장내 소운반비 반영

○ 우수 빗물받이 설치위치는 기존 기둥에 인접하여 시공토록 되어 있으나 기둥(기초) 콘크리트와 간섭되어 설치가 불가능하여 위치이동 필요

- 토공량 변동, pvc pipe 설치

○ 당초 설계도서에 누락된 공사비 반영

- 폐기물 분리선별비, 철판설치, PVC PIPE 곡관 자재비, 잔토처리비등

□ 공사금액 변경 : 증 11,213천원

공 종	단위	수 량		도급공사비			비고
		당초	변경	당 초	변 경	증. 감
1.철거 및 운반공사				-	2,787,081	2,787,081
아스팔트포장절단	m	-	1,240	-	1,616,960	1,616,960
현장내 소운반	m3	-	157	-	1,170,121	1,170,121
2.토공사				6,929,660	9,196,185	2,266,525
터파기	m3	560	797	5,023,760	5,332,097	308,337
되메우기(다짐)	m3	500	746	913,500	1,362,942	449,442
폐기물 분리선별(체가름)	m3	-	157	-	1,657,606	1,657,606
잔토처리(토사) L=52.0Km	m3	60	51	992,400	843,540	-148,860
3.배수공사		-	-	31,906,698	34,260,590	2,353,892
빗물받이설치 300*400	개소	87	-	19,803,027	-	-19,803,027
빗물받이설치 300*400(프리캐스트)	개소	-	87	-	19,094,151	19,094,151
연결관(PE이중벽관) D250	m	157	168	4,768,875	5,103,000	334,125
PVC PIPE 설치 VG1, D100, 자재포함	m	-	307	-	2,288,378	2,288,378
하수관천공및접합 (연결관250mm)	개소	87	87	7,334,796	7,334,796	-
철판설치 t=14mm	m2	-	15	-	440,265	440,265
4.자재대		-	-	-	3,806,250	3,806,250
분기관	ea	-	87	-	3,408,747	3,408,747
PVC PIPE 곡관 VG1, 45º엘보	ea	-	174	-	265,002	265,002
PVC PIPE 곡관 VG1, 90º엘보	ea	-	87	-	132,501	132,501
직접공사비계				38,836,358	50,050,106	11,213,748

공 종	단위	수 량		도급공사비(천원)			검토의견
		당초	변경	당초	변경	증감
․레미콘(25-18-8)	㎥	35	4	2,001	229	감1,772	적정

□ 관급자재비 변경 : 감 1,772천원

□ 감리단 검토의견

○ 실정보고 수량 및 도급공사비 산출 적정 판단

□ 처리의견

○ 감리단의견 적정 판단되어 실정보고 승인하고 추후 설계변경 자문위원회 심의결과에 따라 변경 처리

○ 관급자재(레미콘) 감액변경 조치

○ 관할중구청 협의 완료(안전치수과-21929호, 2016.11.29)

- 착공전 하수도분야 추진계획서 제출 및 협의

붙임 : 실정보고 검토 보고서 1부.  끝.