문서번호	방재시설부-20196
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이석근		이도헌	12/20 임춘근
협조

“신상도 지하차도 확장공사”

설계변경 검토보고(전체 8회, 5차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

방재시설부

- 신상도 지하차도 확장공사 -

설계변경 검토보고(전체6회, 4차5회)

『신상도 지하차도 확장공사』와 관련하여 5차계약분 대광·청학빌라앞

대체부지 종단계획변경에 따른 보완설계와 시점부 도로구조개선에 대한

설계변경 검토보고임(전체8회, 5차1회).

공사개요

○ 위치 : 서울시 동작구 상도동 159-21~207-5간

○ 규모 : 도로확장 2차로→4~6차로 L=324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, L=230m)

○ 공사기간 : ‘07.12.31. ~ ’18.12.31(5차기간 : ‘16.05.19~ ’16.12.31)

○ 도 급 비 : 11,762,278천원(5차 : 61,435천원)

○ 시 공 사 : (유) 한백종합건설외 1

설계변경 현황

○ 총차 8회

- 설계변경금액

구 분	금 액(원)			비고
	당 초	변 경	증,감
도급비	11,762,278,000	11,964,876,000	(증)202,598,000

- 주요변경내역

연번	구 분	주요물량 내역	비고
1	시점부(더샆아파트) 보도Set-back 공사 시행	-교통신호기, 가로등 이설 -교통소통대책 -보도Set-back -미끄럼방지포장, 보행자휀스 등
2	지하차도 동측 상부도로 종단계획변경 보완설계 시행	-옹벽높이, 지하차도 종단조정 빌라진입 횡단구배 조정 -실시계획인가 도서작성 등

○ 5차 1회

- 설계변경금액

구 분	금 액(원)			비고
	당 초	변 경	증,감
도급비	61,435,000	269,709,000	(증)208,274,000

- 주요변경내역

연번	구 분	주요물량 내역	비고
1	시점부(더샆아파트) 보도Set-back 공사 시행	-교통신호기, 가로등 이설 -교통소통대책 -보도Set-back -미끄럼방지포장, 보행자휀스 등
2	지하차도 동측 상부도로 종단계획변경 보완설계 시행	-옹벽높이, 지하차도 종단조정 빌라진입 횡단구배 조정 -실시계획인가 도서작성 등

조치의견

○ 지하차도 시점부(더샾아파트) 부적정한 도로기하구조 개선에 따른 보도

Set-back공사 및 지하차도 동측 상부 부체도로 종단계획 재조정을 위한

보완설계로서 적정하기에 금회 설계에 반영하여 변경 조치코자함.

붙임 : 1)설계변경 내역서(총차8회, 5차1회) 1부.

2)부체도로 종단계획 변경보고서 1부. 끝.