문서번호	도로보수과-6451
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		이상호	12/20 이종엽
협조

설계변경(정산) 검토 보고

『2016 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』

2016. 12. 20.

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(정산) 검토 보고

『2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』

연간단가 공사로 공종별 물량을 추정 발주하였으나 현장여건에 따른 일부공종 증․감이 발생하여 증․감현황을 반영한 설계변경에 대하여 보고드림

▢ 근   거

○ 2016년 도로손상부분 긴급복구공사 설계변경도서 제출

(진우 제16-435, 2016. 12. 15)

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

○ 규    모

- 소규모 포장복구 0.48a, 부대공 1식

- 절삭 후 덧씌우기(t=5cm~20cm) 357.6a

- 소규모 인력포장 복구(t=5cm~10cm) 120a

- 코아채취 400공

○ 계약금액 : 금1,357,923,600원

○ 계 약 자 : *****************

○ 공사기간 : 2016. 3. 3. ~ 2016. 12. 31.

○ 공 정 률 : 100%

▢ 보고내용

○ 탐사동공 원인조사를 위한 굴착작업으로 소규모 포장복구 물량 증가

○ 청량리역 1번 환승승강장 평삭 작업 중 노면에서 T=15cm에서 지장물(SK브로드랜드, 통신관)이 발견되어 포장구간에서 제외 등 현장여건에 따른 일부공정 증․감발생 현황 반영

▢ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

연번	공종	규격	단위	당초	변경	증 ∙ 감	비고
1	소규모 포장복구	A-1	a	0.48	1.69	증 1.21
2	절삭후 아스팔트 덧씌우기	t=5cm~20cm	a	357.6	282.1	감 75.5
3	소규모 인력포장	t=5cm~10cm	a	120	118.5	감 1.5
4	코아채취	공사하부 조사용	공	400	364	감 36
5	부대공		식	1	1	0

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	2,293,446,600	1,670,012,000	감 623,434,600
도 급 비	1,357,923,600	1,216,338,000	감 141,585,600
관 급 비	607,506,000	451,374,000	감 156,132,000
이 전 비	328,017,000	2,300,000	감 325,717,000

▢ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 실시공 수량에 따른 변경계약을 실시하고 준공처리하여 업무추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 정산설계변경내역서 1부.

2. 제비율 검증결과 1부.   끝.