문서번호	시설과-7171
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김영균	임록화	진병규	12/20 이춘희
협 조
	주무관		이전호

「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사」

준공정산 및 완료보고

2016. 12

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사」

준공정산 및 완료보고

「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동신축)」가 준공되어 아래와 같이 준공정산하고 완료처리코자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동신축)

공사기간 : 2016. 03. 07 ~ 11. 10

총공사비 : 금900,507,400원(도급비 788,931,000원/ 관급비 111,576,400원)

도 급 자 : ㈜푸른종원건설(대표 차상민)

감 리 자 : ㈜유현준건축사사무소(대표 허진성)

공사내용

용 도	층수	연 면 적	건폐율	용적률	구 조
업무시설 (대기실,창고)	지하0층 지상2층	465.90㎡	0.09%	0.11%	철근 콘크리트

Ⅱ		추진경위

2015. 01. 26 : 사업추진계획 수립

2015. 12. 24 : 설계용역 준공

2016. 02. 24 : 공사계약

2016. 03. 07 : 공사착공

2016. 11. 10 : 공사준공

2016. 11. 15 : 준공검사

Ⅲ		소요예산

준공정산금액

계약금액	준공정산금액	증․감액	비 고
788,931,000	767,681,931	감21,249,069

<정산내역>

구 분	정 산 내 용			비고
	계약금액	정산액	증감액
국민건강보험료	4,500,681	0	-4,500,681
국민연금보험료	6,592,174	0	-6,592,174
노인장기요양보험료	294,794	0	-294,794
퇴직공제부금비	6,326,536	5,019,000	-1,307,536
산업안전보건관리비	15,626,079	13,640,600	-1,985,479
환경보전비	1,552,436	1,300,000	-252,436
하도급지급보증수수료	419,157	0	-419,157
건설기계대여금지급 보증서발급수수료	362,235	0	-362,235
기타경비	27,677,190	27,662,598	-14,592
소계			-15,729,084
일반관리비,이윤,부가가치세 등			-5,519,985
계			-21,249,069

관급자재

□ 납품내역 : 레미콘 외 4종(철근, 시멘트, 에어컨, 초화류)

□ 계약금액 : 금111,576,400원

Ⅳ		처리의견

상기 내용과 같이 공사가 완료되었으므로 계약부서에 통보코자 함

붙  임 : 1. 준공(정산)내역서 1부.

2. 준공정산동의서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.

4. 준공사진철.  끝.