문서번호	기전과-10400
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	12/20 이종엽
협조
	주무관		이명호

『2016년 교통신호기 유지보수공사2차(연-2구역)』

설계변경 검토보고(최종)

2016. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역)』

설계변경 검토보고(최종)

「2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역)」의 제1차 설계변경 서류가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ ㈜건영E&C 건영 본16-12-31호(2016.12.16.)

- 1차 설계 변경 제출

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사2차(연간단가) 2구역

○ 도 급 자 : ***********

○ 도 급 비 : 금209,818,400원(금이억구백팔십일만팔천사백원)

○ 공사기간 : 2016. 08. 05. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : ㈜건영이앤씨 조순재

▣ 설계변경 현황

○ 작업지시 차수별 정산내역                          (단위 : 원)

연번	구 분	당 초	변 경 후	증·감액
1	제1차 작업지시	181,720,000	165,451,000	-16,269,000
2	제2차 작업지시	52,767,000	56,947,000	4,180,000
3	제3차 작업지시	0	0	0
4	제4차 작업지시	15,840,000	17,668,260	1,828,260
5	제5차 작업지시	6,572,470	6,572,470	0
6	합 계	256,899,470	246,638,730	-10,260,740

○ 제경비 정산 : 2,806,460원

○ 설계변경 사유

- ‘2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연간단가) 2구역’ 최종 작업완료 공정량 물량변경 및 제경비 조정에 의한 설계변경을 하고자 함.

○ 공사비 변경내용                                  (단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감액	비 고
도급비	209,818,400	243,832,270	34,013,870
관급비	31,000,000	29,996,100	-1,003,900
이전비	1,000,000	938,780	-61,220
총공사비	241,818,400	274,767,150	32,948,750

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

▣ 조치의견

○ 상기와 같이『2016년 교통신호기 유지보수공사 2차(연간단가) 2구역』에 대하여 설계변경하여 준공코자 합니다.

붙     임 : 1. 설계변경 제출 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증 1부. 끝.