투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	가시설 공법변경 승인 통보

1. 서분감 2014-179(2014.3.17.)호와 관련입니다.

2. 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』 어스앵커 시공중 지하수의 영향으로 배면침하 및 가시설 변위 발생 등 안전성이 미 확보되어 아래와 같이 안전성이 높은 스트러트 공법으로 변경승인 하였기 알려드리오니 추후 설계변경 등 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경내용

- 기 시공된 어스앵커 1~2단 사이에 보강앵커를 시공하여 정착력확보

- 어스앵커 3~7단을 스트러트 공법으로 변경하여 어스앵커 정착력에 대한 불확실성 해소로 가시설의 안정성 증대

- 지하3층 분뇨저류조와 지하2층 탈취기실 접합벽체 구간에 C.I.P공법 적용

나. 승인조건

- 송풍기동 등 건물주변 계측관리 철저

- 굴착사면 및 배수로 관리를 철저히 하여 굴착사면 우수유입 방지

- 토공 가시설인 쉬트파일 주변 소단설치 후 토공굴착

- 보팀보 설치전 굴착이 과하게(50cm 이내) 되지 않도록 굴착 관리철저

- 어스앵커 구간의 재인장 계획 수립시행.   끝.

	방재시설부장
주무관	송민영		환경시설과장	박희천		방재시설부장	03/20 박종웅
협조자	주무관	조양호
시행	방재시설부-340	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 덕수궁길15 (서울시 서소문별관 2동2층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개