투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3차, 최종) 시행 - 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회, 최종)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 03. 03~ 2016. 12. 31

다. 계약금액 : ***************

라. 도 급 자 : *******************

마. 설계변경사유

○ 탐사동공 원인조사를 위한 굴착작업으로 소규모 포장복구 물량 증가

○ 청량리역 1번 환승승강장 평삭 작업 중 노면에서 T=15cm에서

지장물(SK브로드랜드, 통신관)이 발견되어 포장구간에서 제외 등

현장여건에 따른 일부공정 증․감발생 현황 반영

바. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	*************	*************	************
도급비	*************	*************	************
관급비	***********	***********	************
이전비	***********	*********	************

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이기영		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	12/20 이종엽
협조자
시행	도로보수과-6467	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개(5)