문서번호	급수운영과-32352
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박종대		12/20 오기석
협조

기성검사 조서 제출에 따른 검토 보고서

(2016년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

기성검사 조서 제출에 따른 검토 보고서

(2016년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

『 2016년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』시행 중 위탁공사 감독기관인 서울시시설관리공단과 ㈜이준엔지니어링에서 기성검사(감독) 조서가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : 도로포장 289.8a(아스팔트 263.0a, 콘크리트 10.8a, 보도블록 16.0a)

○ 공사기간 : 2016.06.13. ~ 2017.05.31.

○ 계 약 자 : 성윤개발 대표 이재성

○ 계약금액 : **************

2				기성검사(3회) 개요

○ 관련공문 : 기성검사(감독)조서(3차) 제출 – 포장복구[공사감독2처-17701(2016.12.13.)]

준공(기성)검사 관리조서 제출[이준016-117(2016.12.13.)]

○ 기성기간 : 2016.10.01. ~ 2016.11.06.

○ 기성금액 :*************

○ 기성검사일 : 2016.12.13.

○ 기성내역

계약금액	기성금액			집행잔액	비고
	총계	전회(1~2회)	금회(3회)
**************	************** ** ******************* ********************	************* ** ******************* ********************	************* ** ******************* ********************	************

3				검토사항

○ 검토사항 : 기성 세부내역 타당성 검토

○ 기성 세부내역(내역서 별첨)

연번	비목	계약금액 (원)	계		기성금액				집행잔액		비고
			금액(원)	비율 (%)	전회금액(1~2차)		금회금액(3차)		금액(원)	비율 (%)
					금액(원)	비율 (%)	금액(원)	비율 (%)
1	재료비	294,737,650	265,029,219	89.92%	127,001,496	43.09%	138,027,723	46.83%	29,708,431	10.08%	타당
2	노무비	586,430,822	502,339,614	85.66%	288,540,370	49.20%	213,799,244	36.46%	84,091,208	14.34%	타당
3	경비	349,508,962	315,928,625	90.39%	192,754,399	55.15%	123,174,226	35.24%	33,580,337	9.61%	타당
4	순공사원가	1,442,251,266	1,219,782,721	84.57%	685,153,448	47.51%	534,629,273	37.07%	222,468,545	15.43%	타당
5	일반관리비	79,323,819	67,088,037	84.57%	37,683,431	47.51%	29,404,606	37.07%	12,235,782	15.43%	타당
6	이윤	184,023,136	152,636,515	82.94%	88,843,121	48.28%	63,793,394	34.67%	31,386,621	17.06%	타당
7	부지임대료	5,004,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		100.00%	타당
8	총공사원가	1,710,602,221	1,439,507,273	84.15%	811,680,000	47.45%	627,827,273	36.70%	271,094,948	15.85%	타당
9	부가가치세	171,060,222	143,950,727	84.15%	81,168,000	47.45%	62,782,727	36.70%	27,109,495	15.85%	타당
10	도급금액	1,881,662,443	1,583,458,000	84.15%	892,848,000	47.45%	690,610,000	36.70%	298,204,443	15.85%	타당

4				조치 의견

○ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로, 관련부서(행정지원과)와 협의하여 기성금 지급 등 후속 업무를 추진코자 합니다.

첨부 : 1) 관련 공문 사본 각 1부.

2) 기성검사조서및 기성내역서 각 1부.

3) 기성(3회) 총괄내역서 1부. 끝.