함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신(공릉배수지(3,4지)내부방식공사)

1. 이준 북부-1612-65(2016.12.16.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(3,4지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공릉배수지 5,6지 항출입구 타일보수 작업지시 하였으나 현재 3,4지 내부방식공사로 배수지가 비어 있어 5,6지 항 출입구 벽면 타일보수시 타알파쇄 및 바탕조정시 분진 등이 발생하여 항 내부로 유입시 수질오염 민원발생이 우려되는 실정임.

나. 귀 사에서 제시한 실정보고 내용으로 5,6지 항 출입구 벽면 타일보수공사는 내년 상반기 항청소시 보수함이 타당하다고 사료되므로 추가 작업지시 물량에서 제외후 추후 설계변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,㈜당수산업개발 대표 한천수
주무관	최용진		급수운영과장	12/20 代이승완
협조자
시행	급수운영과-28503	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)