함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신(공릉배수지(3,4지)내부방식공사)

1. 이준 북부-1612-66(2016.12.20.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(3,4지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공릉배수지 4지내 시트 부착시 벽체의 콘크리트면과 배수관(D=1200㎜), 퇴수관(D=500㎜) 유출부가 재질상 상이하여 기존 상수도관과 PE시트 연결시 PE시트 배면에 수돗물이 유입될 시 수질 오염방지와 시설물유지관리를 위하여 기존 상수도관에 PE플랜지 제작 설치가 필요하다고 판단되므로

나. 귀 사에서 제시한 방법으로 시공에 만전을 기하여 주시고 공사의 시급성을 감안 조속 시공하시고 추후 설계변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	㈜당수산업개발 대표 한천수,이준엔지리어링(주) 대표 나석근
주무관	최용진		급수운영과장	12/20 代이승완
협조자
시행	급수운영과-28508	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)