문서번호	설비부-19971
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	12/20 권오식
협조

『 겸재교건설 및 연결도로 확장 전기공사 』

설계변경(총차7회, 6차2회) 및 공기연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사』

설계변경(총차7회, 6차2회) 및 공기연장 검토보고

우리본부에서 시행중인『겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사』와 관련하여 설계변경(총차7회, 6차2회) 및 공기연장 보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사

□ 공사위치 : 서울시 동대문구 휘경동(한천로)~중랑구 면목동

□ 공사기간 : 총차'10.02.05 ~ '16.12.31.(6차'16.01.18 ~ '16.12.31.)

□ 도 급 액 : 721,648천원(6차 96,471천원)

□ 시 공 사 : ㈜유성전기 대표 유명호

□ 감 리 사 : 주식회사 동일기술공사 대표 김 수 보

추진경위

□ 2016.12.05 : 실정보고 승인(벽화조명 전력인입공사외 2건)

□ 2016.12.14 : 설계변경 소위원회 개최

□ 2016.12.16 : 설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 승인

□ 2016.12.19 : 설계변경(총차7회 6차2회)요청

보고내용

□ 설계변경내용

- 설계변경 소위원회 자문결과

(단위 : 천원)

심의요청 금액	심의결과 조정금액	증·감
134,288	133,012	감)1,276

- 공사비 변경(도급액)

(단위 : 천원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감
총 차(7회)	721,648	854,660	증)133,012
6 차(2회)	96,471	229,483	증)133,012

- 6차분 변경내용(직접공사비)

(단위 : 천원)

연번	변경내용	변경금액
1	명품교량 설치에 따른 벽화조명용 전원인입 배관ㆍ배선공사	53,896
2	중랑천 교량 접근용 E/V 전기ㆍ통신용 배관ㆍ배선공사	24,807
3	인수인계관련 유관기관 요청사항 반영	4,224
합 계		82,927

□ 6차공사 준공기한 연기

- 연기사유 : 토목공사 추진일정에 맞춰 전기공사 준공기한 연기

구분	변경 전	변경 후	증·감
총 차	2010.02.05.~2016.12.31.	2010.02.05.~2017.01.31.	증 31일
6 차	2016.01.18.~2016.12.31.	2016.01.18.~2017.01.31.	증 31일

□ 건설사업관리 기술단 의견

- 실정보고(설계변경 소위원회 자문결과 등)승인에 따른 설계변경건에 대한 검토결과 공기연장 및 계약금액 조정을 위한 설계변경이 타당함.

보고자 의견

□ 설계변경(총차7회, 6차2회)에 대한 건설사업관리 기술단의 검토의견이 적정한 것으로 판단됨

□ 계약부서에 계약금액이 조정될 수 있도록 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리 기술단 공문 1부.

2. 설계변경(총차7회, 6차2회)도서 1부.

3. 시공사 공문 및 합의서 1부.끝