투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『자전거도로 유지보수 공사(교통안전표지)』 준공기한 연기 시행

우리사업소 관내『자전거도로 유지보수공사(교통안전표지)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(공기연장)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 자전거도로 유지보수공사(교통안전표지)

2. 공사기간

- 당초 : 2016.12.12. ~ 2016.12.31.

- 변경 : 2016.12.12. ~ 2017.01.30.

3. 공사위치 : 시 경계 상충구간(신월로,화곡로) 외 2개 항목

4. 도 급 자 : ㈜엘리건스 대표자 이영재

5. 설계변경내역 (변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	62,582,490	62,582,490	-	변경 없음
도 급 비	62,582,490	62,582,490	-

6. 설계변경 사유 : 본 공사의 계약 일정에 따른 자재구입 및 현장 실사                   준비등 기간소요로 절대공기 부족함으로 공기 연장하여 원활한 공사를                  진행하고자 합니다.

7. 예산과목 : 교통사업특별회계/보행자전거과/자전거이용시설확충 및 관리/                   자전거도로 유지보수/시설비

붙임문서 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기요청 실정보고 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	김근수		기전과장	박재경		강서도로사업소장	12/20 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	기전과-16683	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	billymi@seoul.go.kr	/	대시민공개