함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	생산관리과장
(경유)
제 목	용역 변경 계약 체결 알림 (뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업 관리 용역)

1. 생산관리과-17462(2016. 12. 16.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 건설사업관리 용역

나. 계약업체 : ******************

다. 계약금액 : 431,420,000원

라. 변경내용 : 계약금액 변경 및 용역기한 연장

구 분	당초	변경	비 고
금액	431,420,000원	562,100,000원	증 130,680,000원
용역기한	2016.3.8.~12.31.	2016.3.8.~2017.7.14.	증 195일

마. 변경 사유

- 용역기간 연장에 따른 기술자 투입계획 변경

- 공사기간 연장에 따른 건설사업관리 용역기한 연장

따로붙임 : 변경계약서 1부. 끝

	재무회계과장
주무관	황한범		재무회계과장	12/20 박병식
협조자
시행	재무회계과-18240	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)