투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	건설사업관리자 투입기간 검토 통보

1. 토목부-25824(2016.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인『서울역 7017 프로젝트 건설공사』와 관련 ‘건설사업관리자 투입기간’을 검토하여 통보하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

분야	공사기간	기존 투입기간	변경 투입기간	사 유	비 고
건축	‘16.5.27 ~ ‘17.4.26	‘16.6.1 ~ ‘17.2.16	‘16.6.1 ~ ‘17.8.30	∙ 서울역 파출소 신축에 따른 감리 투입기간 연장 필요 ∙ 건축 규모 증가로 건축분야 상주감리원 (중급이상) 1명 추가 필요 : 1명→2명	파출소는 ‘17.7.31 준공 예정

끝.

	건축부장
주무관	정재철		건축총괄과장	박범규		건축부장	12/21 김진용
협조자	지방시설사무관대우	차무흥
시행	건축부-18131	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2604	/전송	02-3708-2659	/	arc44136@seoul.go.kr	/	부분공개(5)