투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『서울숲공원 편의시설 개선공사』 설계변경시행

1. 서울숲공원관리사무소-642((2016.12.21.)호와 관련입니다.

2.“서울숲공원 편의시설 개선공사” 와 관련하여 다음과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울숲공원 편의시설 개선공사

나. 공사기간 : 2016. 11. 23 ~ 12. 22

다. 도 급 자 : ************

라. 도 급 액 : 금156,974,550원(금일억오천육백구십칠만사천오백오십원)

마. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비 고
		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		165,297,550	171,044,460	증)5,746,910
도급비	소 계	156,974,550	167,849,000	증)10,874,450
	공급가액	142,704,137	152,590,000	증)9,885,863
	부가세	14,270,413	15,259,000	증) 988,587
관 급 자 재 비		8,323,000	3,195,460	감)5,127,540

자. 예산과목 : 푸른도시국녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리

및이용활성화, 시공원유지관리및보수정비(도시개발특별회계), 시설비

붙임 : 1)변경내역서 1부.  2)설계변경시행 보고서 1부.  3)제비율검증표 1부.  끝.

주무관	박선재		시설팀장	김완수		서울숲공원관리사무소장	윤학수		동부공원녹지사업소장	12/21 이춘희
협조자	주무관	지정희		주무관	이전호
시행	서울숲공원관리사무소-6427	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화	02-460-2921	/전송	02-460-2930	/		/	부분공개(6)