문서번호	총무과-44015
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		임철수	12/21 정상택
협 조
	주무관			이현정
	주무관			이기림

「2016년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)」 설계변경(준공정산)검토보고

2016. 12.

2016년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(준공정산)검토보고

2016년도 건축시설물 유지보수공사(연간단가) 시행중 발생한 물량증감, 신규비목 추가에 대한 설계변경 및 준공처리를 위한 제경비(보험료 등) 정산을 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명  : 2016년도 시청사 건축시설물 유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사기간  : 2016. 02. 26 ~ 2016. 12. 31

○ 계약금액  : *************

○ 계약업체  :*************

○ 계약내용  : 건축시설물 유지보수공사 1식

□ 설계변경 및 정산 검토내용

○ 대  상

- 설계변경으로 인한 계약 내용변경(물량증감, 신규비목 등)

- 준공처리전 제경비 정산 처리(보험료 및 환경보전비 등 각종 수수료)

○ 규  정 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제74조 (설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 물량증감 : 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을

곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 변경내용

○ 변경금액 : ************

구 분	금 액 (원)			비고
	계 약	변 경	증 감 액
총 공 사 비	***********	***********	***********

○ 세부공사내용

연번	공 사 내 용	공사금액 (천원)
1	서소문청사 및 청계별관 재배치 공사 서소문청사 외부데크철거 공사, 시민청 운영사무실 조성	***********
2	서소문청사 및 후생동 옥상 방수 남산1별관(1,2,3층) 재배치공사	***********
3	남산1별관 4층 재배치공사 중부녹지사업소 및 품질시험소 환경개선 공사 후생동(1층)천정 보수 공사 등	**********
4	사업소(도시기반시설본부 외 5개소)사무환경 개선 공사 서소문청사 1동 11층 사무환경 및 1층 방재실 정비 공사	***********
합 계		***********

○ 검토결과

- 물량증감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액 적용

- 제 경 비

· 보험료 및 환경보전비 등 각종 수수료 정산처리

□ 향후일정

○ `16. 12. 23 변경 계약 체결

○ `16. 12. 26 공사 준공(4차 기성 준공 금액)

변경금액	전회까지 기성금액	최종(4차)기성금액	비고
***********	***********	***********

따로붙임  1. 변경설계서 및 시공사 제출 공문 1부.

2. 기성내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.