문서번호	설비부-20022
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	12/21 권오식

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기, 통신공사』

1차 준공 및 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

도시기반시설본부

(설비부)

「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기, 통신공사」

1차 준공 및 납품기한 연기 검토보고

「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기,통신공사」의 1차 공사 준공기한 및 LED 조명기구 납품기한 연기를 위해 보고드림.

사업개요

□ 사 업 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기,통신공사

□ 위    치 : 종로구 종로3가동 175-4번지 일대

□ 공사규모 : 공원조성 3,748㎡, 데크조성8.5~9×860m, 데크 5.5×430m×2열 신설

전력간선설비, LED조명 설비, CCTV설비, 방송설비 등

관련근거

□ itm 제16-1968호(2016.12.14.)     <1차 전기, 통신공사 준공기한 변경 건>

□ itm 916 제16-0509호(2016.12.20.) <LED 조명 납품기한 연기 요청 건>

변경내용

ⅰ 준공기한 연기

구 분	도급사	계약금액-1차 (변경없음)	준공기한			비 고
			1차		총차 (변경없음)
			변경 전	변경 후
전기	㈜금강전력	1,077,890,000	2016.04.25. ~2016.12.31	2016.04.25. ~2017.03.31	2016.04.25. ~2017.05.31.	증 90일
통신	㈜신보	344,137,000

□ 연기사유 : 문화재 발굴로 건축공사가 연기되어 전기, 통신공사도 준공기한 연기함.

ⅱ 납품기한 연기

구 분	계약업체	계약번호	계약금액 (변경없음)	준공기한		비 고
				당초	변경
LED 조명기구	중일전기(주)	32143098103	28,424,000	2016.12.31.	2017.05.31.

□ 연기사유 : 물품 설치시기 미도래

검토내용

□ 1차 공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기에 관한 감리단의 검토의견이 적합한       것으로 판단되어 재무국과 건설총괄부에 변경계약을 요청하고자 합니다.

붙임 : 1. 합의서 각 1부.

2. 감리사 공문 각 1부.  끝.