문서번호	서울숲공원관리사무소-6422
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장	동부공원녹지사업소장
박선재	김완수	윤학수	12/21 이춘희
협 조
	공원운영과장		서동선
	주무관		이전호

『서울숲공원 편의시설 개선공사』설계변경 시행보고

2016. 12.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

『서울숲공원 편의시설 개선공사』설계변경 시행보고

우리공원에서 시행중인 『서울숲공원 편의시설 개선공사』에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲공원 편의시설 개선공사

❍ 공사기간 : 2016. 11. 23~ 12. 22

❍ 총공사비 : 금165,297,550원

(도급액:금156,974,550원/관급자재:금8,323,000원)

❍ 공사개요

- 게이트볼장⦁테니스장 비가림 파고라 설치 등 편의시설 개선

❍ 도 급 자 :*************

Ⅱ		변경내역

연 번	공종별 변경 내역	공사비(천원)	비 고
1	⦁철거공사 - 테니스장 휀스철거 (당초0식 →변경1식): 증)878천원	증)878	현장여건에 따른 변경 “승인” 『서울숲공원- 6296(12.08)』
2	⦁시설물공사 - 락커룸 설치 (당초1동→변경2동): 증)28,383원 - 락커설치(당초 일반→변경 옵션추가: 증)2,337천원 - 비가림 파고라(테니스장 내) (당초4동→변경2동): 감)53,978천원 - 비가림 파고라(케이트볼장 내) (당초0동→변경1동): 증)18,866천원 - 목재 경계목(게이트볼장 내) (당초0m→변경105m): 증)2,639천원 - 트랜치(물가변동 반영분): 증)275천원	감)1,478	〃
	- 음수전 보수 (당초0개소 → 변경1개소): 증)571천원 - 자재 보관함 (당초0개소 → 변경1개소): 증)2,500천원	증)3,071	“승인” 『서울숲공원- 6342(12.13)』
	- 진동로라 보관함 (당초0개소 → 변경1개소): 증)1,579천원	증)1,579	“승인” 『서울숲공원- 6364(12.16)』
3	⦁포장공사 - 콘크리트 베이스(당초 27㎡ → 변경55㎡): 증)403천원 - 목재데크 깔기(당초17㎡→ 변경44㎡): 증)3,465천원	증)3,868	“승인” 『서울숲공원- 6296(12.08)』
소계		증)6,339
4	⦁관급공사 - 자재보관함(관급자재 구입불가) (당초2개소 → 변경0): 감)5,128천원	감)5,128	“승인” 『서울숲공원- 6342(12.13)』

Ⅲ		공사비 변경 내역

❍ 공사비 증・감 내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비 고
		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		165,297,550	171,044,460	증)5,746,910
도급비	소 계	156,974,550	167,849,000	증)10,874,450
	공급가액	142,704,137	152,590,000	증)9,885,863
	부가세	14,270,413	15,259,000	증) 988,587
관 급 자 재 비		8,323,000	3,195,460	감)5,127,540

Ⅳ		조치계획

❍ 현안사항 반영 설계변경 시행→계약의뢰(공원운영과)

❍ 도급비 증액분(10,875천원)은 공사 낙찰차액을 활용하여 예산집행

붙임 : 1)공사실정보고서 1부, 2)변경내역서 1부, 3)제비율 검증표 1부.  끝.