문서번호	시설과-11030
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		김도섭	12/21 강신재
협조

『사당배수지 건설공사』

현장 실정보고(가설울타리 및 홀딩도어 설치 외)

2016. 12.

상수도사업본부

(시설과)

『사당배수지 건설공사』

현장 실정보고(가설울타리 및 홀딩도어 설치 외)

『사당배수지 건설공사』시행과 관련하여 가설울타리 및 홀딩도어 설치 등 변경 및 추가사항에 대한 건설사업관리자 실정보고 검토사항을 보고 드림.

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 사당배수지 건설공사

○ 공사기간 : 2016. 12. 06.~2019. 05. 24

○ 도 급 비 : 4,849,729,800원

○ 공사개요 :  배수지 용량 V= 5,000㎥

송수관로 D=400㎜, L=372m

급수관로 D=500㎜, L=1,260m

○ 시 공 자 : ㈜한양아크라임 외 1개사

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

2. 보고요지

○ 가설울타리, 홀딩도어 설치 및 기존 파고라 철거의 공정계획 변경

○ 시공 상세도 작성 반영

3. 보고내용

○ 가설울타리, 홀딩도어 설치 및 기존 파고라 철거의 공정계획 변경

- 가설방음벽 및 홀딩도어 설치는 현장 여건상 전주, 수목, 가로등의 간섭으로 설치가 불가하며, 파고라의 경우 철거물 주변 수목 및 놀이시설이 있어 철거용 장비와 폐기물 운반용 차량의 진입이 어려움.

- 동절기 공사진행으로 인한 안전사고 우려와 공사시행 전 주민설명회를 통한 민원을 최소화하여 공사추진시 발생 예상되는 문제점을 사전 조치 후 공정을 추진하기 위해 상기 공정을 2차수 공사에 반영하는 공정계획 변경이 타당하다고 사료됨.

○ 시공 상세도 작성 반영

- 시공 상세도는 설계서 및 현장여건 등을 철저히 검토 후 건설공사의 진행 단계별로 현장 상황을 고려하여 작성하도록 되어 있음.

- 원활한 공사추진을 위하여 공사시행 전 현장여건을 고려한 시공 상세도 작성에 대한 반영은 적정하다고 사료됨.

4. 수량 증․감 현황

구 분	수 량		증·감	비고
	당초	변경
부대공
1. 가설방음벽	225m	- m	감) - 225m
2. 홀딩도어	1set	- set	감) - 1set
3. 기존 파고라 철거	1개소	- 개소	감) - 1개소
4. 시공 상세도 작성	매	10 매	증) 10매	보통5매, 복잡5매

5. 공사비 증․감 현황

공 종	금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
공 사 비	84,000,000	6,700,000	-77,300,000
도 급 비	84,000,000	6,700,000	-77,300,000
공급가액	76,363,636	6,090,909	-70,272,727
부가세액	7,636,364	609,091	-7,027,273
관급자재비	-	-	-

6. 책임사업관리자 검토의견

상기 검토내용과 같이 사당배수지 건설공사(장기계속계약)의 변경이 필요할 것으로 판단되므로 실정보고 내용과 같이 추후 설계변경시 반영함이 타당하다고 사료됨.

7. 설계변경 근거

지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 공사의 설계변경, 5.발주기관의 필요에 의한 설계변경 통보, 3)공정계획의 변경, 4)시공방법의 변경

8. 조치의견

상기 보고내용에 대한 책임사업관리자의 검토사항이 타당하므로 원활한 공사 추진을 위해 실정보고 사항을 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

붙임 : 현장 실정보고(대한(국사관리단)제2016-14) 1부.  끝.