문서번호	설비부-20026
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	12/21 권오식
협조

『동부간선도로확장공사(1공구) 전기 및 통신공사』

공사 준공기한연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

『동부간선도로확장(1공구) 전기 및 통신공사』

공사 준공기한연기 검토보고

「동부간선도로확장(1공구) 전기 및 통신공사」와 관련 선행공정(토목공사)의 준공기한 연기에 따라 전기·통신공사의 준공기한을 연기코자 검토 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 토목부-26468(2016.12.21) : 시설공사 준공기한 및 공사중지 연기 검토보고

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(1공구) 전기 및 통신공사

□ 공사위치 : 월계1교~녹천교구간 1.4km 및 초안산지하차도

□ 공사기간 : 2008. 12. 29 ～ 2016. 12. 31

□ 공 사 비 : 전기-640,610천원, 통신-707,932천원

□ 시 공 사 : 전기-(주)오무전기, 통신-퓨젼아이앤씨(주)

□ 감 리 사 : 포스코엔지니어링(주)- “공사중지로 철수”

Ⅲ. 검토내용

□ 공사기간 연장사유

∙동부간선도로확장공사(1공구)를 위하여 시행중인 경원선 철도이설공사의 지연에 따라 사업주관부서(도로계획과)로부터 철도이설사업  이설기한이 2016.12월에서 2017.09월 까지 연장 통보되어 선행공정(토목)이 준공기한 및 공사 중지기간을 연기함.

∙공사기간 조정

공 사 명	당 초	변 경	비 고
동부간선도로확장(1공구) 전기공사	2008.12.29.~ 2016.12.31	2008.12.29.~ 2019.12.31	증 36개월
동부간선도로확장(1~2공구) 통신공사	2008.12.29.~ 2016.12.31	2008.12.29.~ 2019.12.31	증 36개월

- 연기사유 : 선행공정인 토목공사 공기변경에 따른 공기연장

- 지체상금부과여부 : 미부과

Ⅳ. 보고자 의견

□ 경원선 철도이설공사의 지연으로 선행(토목)공사도 준공기한을 연기하여 전기 및 통신공사의 준공기한도 선행공정에 맞춰 2019.12.31로 연기하고 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 1. 시설공사 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 전기 및 통신공사 공사기간 연기합의서 각 1부.   끝.