함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(1차) 및 차수별부기금액 변경(2016년 강서수도사업소관내 건설폐기물 처리용역-단위공사,포장복구)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 【2016년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역-단위공사,포장복구(장기계속단가계약)】에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)시행 및 차수별 부기금액을 조정코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2016년 강서수도사업소관내 건설폐기물 처리용역-단위공사,포장복구(장기계속)

나. 도 급 자 : ㈜원보 대표 김그레이스

다. 용역기간 : 2016.06.07.~2016.12.31.(총부기기간:2016.06.07.~2017.6.30.)

라. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도(송배수관)정비)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도(배급수관)정비)

마. 설계변경사유 : 계약물량 증․감 및 신규공종 발생

바. 차수별 설계변경내역                                         (단위: 원)

구 분	총부기금액		1차수 부기금액 (2016년)		2차수 부기금액 (2017년)		비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
용역비	107,581,000	107,581,000	84,925,000	94,431,000	22,656,000	13,150,000

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서(관련서류) 및 설계변경내역서 1부

2. 설계변경 심의결과서 1부

3. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	박용석		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	김정수		강서수도사업소장	12/21 이인걸
협조자	주무관	代정선이		행정관리팀장	심정섭		계약2팀장	양주춘
시행	급수운영과-35729	(		)	접수		(		)
우	08013		/
전화	3146-3942	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개