문서번호	누수방지과-12464
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
노경철		김영삼	12/21 강신재
협 조
	주무관			이태형

「상수도공사 (급수, 누수, 시설물) 강남지역 건설사업관리용역」 설계변경 소위원회 개최결과 보고

2016. 12.

상수도사업본부

(누수방지과)

설계변경 소위원회 개최결과 보고

상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역 2차분에 대한 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 소위원회를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 장 소  : 시설안전부 회의실

○ 일 시  : 2016. 12. 21.(수) 9:30~10:30

○ 참석자 : 누수방지과장, ********************************

□ 용역내용

○ 용 역 명 : 상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역(장기계속단가계약)

○ 용역기간 : 2015. 6. 22.~2017. 6. 21.

○ 계약금액 : 4,293,820,000원

○ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체,포장등) : 17,694건

- 누수복구 분야(누수복구,포장,공사장 입회 등) : 16,752건

- 시설물 분야(노후밸브교체,배수지,시설물 등) : 3,145건

○ 계약상대자 : ㈜이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링, ㈜신성엔지니어링

○ 용역비 및 용역기간

구 분	용역비	용역기간	비 고
총부기 금액	4,293,820,000	2015. 6. 22.~2017. 6. 21.
1차수 금액	1,077,395,000	2015. 6. 22.~2015. 12. 31.
2차수 금액	2,181,080,000	2016. 1. 1.~2016. 12. 31.	금회분
3차수 금액	1,035,345,000	2017. 1. 1.~2017. 6. 21.

□ 설계변경 사유

○ 주요 설계변경 내용

- 1차분 (변경사항 없음)

· 근무인원수

구 분	규 격	단 위	수 량		비 고
			당 초	변 경
고급기술자	평일	인. 월	6.393	6.393	-
중급기술자	평일	인. 월	56.630	56.630	-
초급기술자	평일	인. 월	119.869	119.869	-
중급기술자	야간 및 휴일	인. 일	144.5	144.5	-
초급기술자	야간 및 휴일	인. 일	365.5	365.5	-

- 2차분 (2016. 12. 31 변경)

· 근무인원수

구 분	규 격	단 위	수 량		비 고
			당 초	변 경
고급기술자	평일	인. 월	12	11.068	감 0.932
중급기술자	평일	인. 월	108	98.634	감 9.366
초급기술자	평일	인. 월	228	208.754	감 19.246
중급기술자	휴일 및 시간외	인. 일	362	313.5	감 48.5
초급기술자	휴일 및 시간외	인. 일	601	841.5	증 240.5

※ 총사업비 변경없이 3차분에서 조정

- 3차분 (2016. 12. 31. 변경)

· 근무인원수

구 분	규 격	단 위	수 량		비 고
			당 초	변 경
고급기술자	평일	인. 월	5.607	7.922	증 2.315
중급기술자	평일	인. 월	51.370	59.566	증 8.196
초급기술자	평일	인. 월	108.131	119	증 10.869
중급기술자	야간 및 휴일	인. 일	216.5	171	감 45.5
초급기술자	야간 및 휴일	인. 일	233.5	238.5	증 5

○ 감리 투입 누계 (총괄)

- 당초

구 분	주간			휴일 및 야간
	고급	중급	초급	고급	중급	초급
총 계	24	216	456		723	1,200
1차수	6.393	56.630	119.869	-	144.5	365.5
2차수	12	108	228	-	362	601
3차수	5.607	51.370	108.131	-	216.5	233.5

- 변경

구 분	주간			휴일 및 야간
	고급	중급	초급	고급	중급	초급
총 계	25.383	214.83	447.623		629	1,445.5
1차수	6.393	56.630	119.869	-	144.5	365.5
2차수	11.068	98.634	208.754	-	313.5	841.5
3차수	7.922	59.566	119.000	-	171.0	238.5

□ 심의결과

○ 근무일수 변경에 따른 차수별 금액 변경내용 타당

○ 제경비 적용 타당

□ 설계변경 금액내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총부기 금액	4,293,820,000	4,293,820,000	-
1차 금액	1,077,395,000	1,077,395,000	-
2차 금액	2,181,080,000	2,075,315,000	감 105,765,000원
3차 금액	1,035,345,000	1,141,110,000	증 105,765,000원

□ 향후계획

○ 상기와 같이 심의 의결(적정)된 금액변경 사항에 대하여 설계변경을 추진코자 함.

○ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰 : 본청 재무과

○ 설계변경 후 최종 위탁용역비 지급

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 의결서 1부.  끝.