함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	급수설비과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보[아리수 음수대 유지관리 용역]

1. 급수설비과-10922(2016.12.19.)호와 관련입니다.

2. 『아리수 음수대 유지관리 용역』에 대한 변경계약을 체결하고 통보하니 업무체 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 자 :***********: 유인수

나. 용역개요 : 음수대, 냉각기, 압축기 등 교체

다. 계약기간 : 2016.05.12. ∼2016.12.31.

라. 변경계약 현황                                    (단위:천원)

구분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.05.12.∼ ’16.12.31.	175,961	‘16.05.12.∼ ’16.12.31.	173,610	(감)2,351

마. 변경사유

- 물량변경과 신규공정 발생에 따른 설계 변경

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 계약서 1부. 끝.

	재무회계과장
주무관	김경식		재무회계과장	12/21 박병식
협조자
시행	재무회계과-18299	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)