문서번호	교량안전과-23386
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		박영권	12/21 代오재영
협조

『한강대교 외 2개소 수중구조물』

실시설계 용역 준공기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

교량안전과

『한강대교 외 2개소 수중구조물』

실시설계 용역 준공기한 연기 보고

‘16년 한강교량 수중구조물 손상부 보수․보강을 위해 시행한 실시설계 용역 사전절차(VE,계약심사) 이행으로 준공기한 연기를 위해 보고 드림

Ⅰ		추진근거

❍ 본부장 방침(교량안전과-22905. 2016.12.14.)

- “한강대교 외 2개소 수중구조물” 실시설계 용역 보고

Ⅱ		용역 개요

□ 시설물 규모 : 5개 교량, 47기

연번	시설물명	위 치	우물통 기초(규모)		대 상	준공년도
			최대둘레	평균수심
계	5개 교량				47기
1	(신,구) 한강대교	용산구 한강로동~동작구 본동	20.4m	7.2m	25기	신)1986 구)1937
2	성산대교	마포구 망원동~영등포구 양평동	42.6m	8.3m	10기	1980
3	성수대교	성동구 성수동~강남구 압구정동	67.2m	6.1m	6기	1997
4	행주대교	덕양구 행주외동~강서구 개화동	76m	10m	3기	1995
5	서강대교	마포구 신정동~영등포구 여의도동	29m	6.9m	3기	1999

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 한강대교 외 2개소 우물통 보수공사 실시설계 용역

❍ 용역기간 : 2016.7.8 ~ 2016.12.31.

❍ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래 (사업책임자 이승환)

❍ 용 역 비 : 171,416천원

Ⅲ		보고내용

□ 준공기한 연기

❍ 당초 : 2016.7.8 ~ 2016.12.31

❍ 변경 : 2016.7.8 ~ 2017. 1.31 (1개월 연장)

□ 사유

❍ 근거 : 계약심사과-20683(2016.12.19.)

❍ 내용 (사전절차 이행)

- VE(설계경제성) : 2016.12.19.~2017.1.10

- 계약심사 : 2017.1.11. ~ 1.20(10일간)

- 준공 및 납품서 제출 : 2017. 1.31한

Ⅳ		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 실시설계 준공기한을 연기하여 용역관리에 만전을 기하고자 함

❍ 지체상금 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.    끝.